문서번호	시설관리과-12522
결재일자	2018.7.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
윤복철		박은선	07/19 최규해
협 조
	주무관			정연준

「반포배수지(1~2지) 내부 방수․방식 공사」 예산부족에 따른 계획물량 변경 조치계획

2018년  4월

강남수도사업소

「반포배수지(1~2지) 내부 방수․방식 공사」

예산부족에 따른 계획물량 변경 조치계획

「반포배수지(1~2지)내부 방수․방식 공사」를 위해 계열별 공법 선정후 실시설계를 한 바, 당초배정 예산으로 사업을 시행할 수 없기에 예산범위내에서 계획물량을 변경 조치하여 발주 시행코자 함.

Ⅰ		현 황

□  주요 진행사항

□ 반포배수지(1~2지)내부 방수방식공사 계열별 공법선정

- 시설관리과-6659(2018. 4. 12)호

□ 예산부족분 본부에 예산배정 요청

- 시설관리과-8663(2018.5.16.)호,시설관리과-11019(2018.6.25)호

□ 예산 배정요청 회신[본부 시설관리과-4479(2018. 5. 24)호]

- 회신내용 : 방수․방식면적,불요불급한 공종, 사업우선 순위등을 검토하여 예산범위내에서 자체검토안을 마련하여 시행

□  사업개요(당초)

□ 사 업 명 : 반포배수지(1~2지) 내부 방수․방식 공사

□ 사 업 비 : 2,760백만원 (당초공사비)

□ 사업내용 : 내부방식 면적 18,638㎡(도막 6,989㎡,패널 5,082㎡,시트 6,567㎡)

구 분	계	내부 방식면적(㎥)				비 고
		1지	계열	2지	계열
계	18,638	9,319		9,319
천 장	5,504	2,752	도막	2,752	도막
벽체(도류벽포함)	5,200	2,600	패널	2,600	시트
기 둥	2,970	1,485	도막	1,485	시트
바 닥	4,964	2,482	패널	2,482	시트

□  사업비 산출 및 예산 부족현황

□ 사업 실시설계한 바, 내부방식물량 증가

- 당초 18,638㎡ → 변경 26,091㎡(계단면적 등 포함 7,453㎡ 증가)

□ 본부 당초 예산배정 산출근거

- 2016년도 정밀점검용역 검토보고서의 개략공사비 반영

※ 개략공사비에는 제경비가 미반영됨(약40%)

- 2016년 대비 노임 및 자재비 등 증가

□ 예산 부족현황                                   (단위:백만원)

구 분	당초 배정금액	실시설계금액	부족금액	비 고
사업비	2,760	5,648	2,888

- 실시설계를 한 바, 당초 배정예산이 부족한 실정임.

Ⅱ		예산 부족에 따른 시행방안

□  사업 계획물량 조정하여 당초 예산범위내에서 시행

□ 반포배수지(1~2지)의 내부 구조물 부위별로 선별적 선정

- 우선순위 : 바닥→벽체→천장→도류벽․기둥→계단 순으로 시행

※ 위 우선순위에 의거 예산범위(2,760백만원)내에서 시행하되, 기배정예산 부족시 계단,도류벽(기둥) 순으로 제외.

□ 계열별 공법(자재)에 대한 시행계획

시 설 물 명		계 열	면적(㎡)	시공(공법) 업체	비 고
계			18,639
반포배수지 (1지)	천 장	도 막	2,752	ECOTECT공법	시행
	벽 체	패 널	2,600	ECO-PANEL시스템공법	시행
	기 둥	도 막	1,485	ECOTECT공법	제외
	바 닥	패 널	2,482	ECO-PANEL시스템공법	시행
반포배수지 (2지)	천 장	도 막	2,752	ECOTECT공법	시행
	벽 체	시 트	2,600	DS.Sheet Lining20공법	시행
	기 둥	시 트	1,485		제외
	바 닥	시 트	2,482		시행

※ 벽체면적 중 도류벽은 실시설계결과 예산부족시 제외

□  공법선정업체 단가산출내역 적정성 검토 및 공사비 조정

□ 공법 선정업체

- 도막계열 : ECOTECT공법, ㈜삼주에스엠씨

- 패널계열 : ECO-PANEL SYSTEM공법, 매일종합건설(주)

- 시트계열 : DS.Sheet Lining20공법, 대실테크(주)

□ 선정업체로부터 제공받은 단가산출내역서 적정성 검토

- 공종, 노임, 자재비 및 제경비 등

□ 벽체․바닥 부위의 패널계열 공법에 대한 단가 협의조정

- 선정된 패널계열 ECO-PANEL SYSTEM 공법의 제안서 표준공사비 1㎡당 단가가 257,678원으로 유사 타공법(패널계열 타일 121,015원, 시트계열 스텐레스 228,000원) 단가보다 높게 제출되어 단가산출의 적정성 여부를 선정업체로 하여금 재검토토록한 후 협의단가 적용

Ⅲ		향후 추진계획

□  예산범위내 설계내역서 작성 및 계약심사

□ 설계내역서 작성 : 2018. 7. 19 ~ 7. 30

□ 본청 계약심사과 계약심사의뢰 : 2018. 8. 1 ~

□ 본청 계약심사과 계약심사 결과 통보 : 2018. 8월초(예정)

□ 본청 안전감사담당관 일상감사 의뢰 : 2018. 8월초(예정)

□ 본청 안전감사담당관 일상감사 결과통보 : 2018. 8월초(예정)

□  공사시행 발주 및 계약의뢰

□ 공사시행 방침 : 2018. 8월 중순

□ 공사계약 의뢰 : 2018. 8월 중순

□ 공사 기간 : 2018년 9월 ~ 2018년 12월 30일까지

따로붙임 : 1. 본부 배수지 방수방식 계열선정 결과 공문 각. 1부.

2. 실시 설계내역서(예산부족분 참고자료).  끝.