문서번호	교량안전과-12808
결재일자	2018.7.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
전재형		이홍재	07/19 한유석
협조

- 2018년 보라매고가 보수공사 -

실정보고에 대한 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 7.

교 량 안 전 과

(강남일반교량팀)

- 2018년 보라매고가 보수공사 -

실정보고에 대한 검토보고

본 공사와 관련 건설사업관리단으로부터 실정보고가 있어 검토하고 그 결과를 보고 드림.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 2018년 보라매고가 보수공사

❍ 공사기간 : 2018.05.18. ~ 2019.01.10.

❍ 총공사비 : 1,507,881천원(도급비 1,128,564천원, 관급비 68천원,이전비 125,247천원)

❍ 공사규모 : 교면방수 및 포장 34a, 균열보수 841.9m,

신축이음보수 39.8m, 강재도장 1,951㎡ 등

❍ 시 행 사 : 시공 세빛에이엔씨㈜ / 감리 ㈜유신

□ 실정보고 검토사항

❍ 검토내용

- 방호벽 균열보수(0.3m/m이상)구간 당초설계와 현장 상이

⇒ 실측에 의한 수량 증가 (당초 512m → 변경 718m)

⇒ 철근 피복두께 부족에 의한 단면보수 규격 및 수량 변경

(당초 t=10mm, 58㎡ →  변경 t=20mm , 134㎡ )

- 강재 재도장구간 추가 시행 (2공구 우안)

(당초 강박스 2열 1,951㎡ → 3열 2,731㎡)

⇒ 차량통행으로 인한 강박스 접촉구간은 공중비계 높이를

당초 1m에서 0.6m로 설치하여 안전조치후 도장

- 소요예산 : 99,953천원

❍ 검토결과

- 방호벽 구간 균열보수 현장점검 결과 일부구간 피복두께 부족에 따른 균열발생으로 확인되어 단면보수로 변경하는 것이 타당하며, 추가로 발견된 균열에 대하여도 보수가 필요함

- 강박스 도장구간은 당초 총 3열중 2열에 대하여 재도장하는  것으로 설계되었으나, 3열중 1열 도장을 추후에 시공할 경우 공중비계설치 비용 등이 추가발생되고 유지관리 확보차원에서 잔여 1열도 금회에 추가 정비하고자함.

□ 조치계획

❍ 책임건설사업관리기술자의 실정보고를 검토한 바, 적정하므로 승인통보하여 시행하고, 소요예산은 공사비중 이전비(125,247천원)범위내에서 활용하고 추후 설계변경하여 정산처리

붙임 : 책임건설사업관리기술자 실정보고 1부.  끝.