위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	(주)롯데물산 외 2개사 대표이사
(경유)
제목	사업비 조정 사항 알림

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 제2롯데 교통개선대책으로 귀 사에서 사업시행 중인「장지지하차도 ~ 동부간선
도로간 연결로 설치공사」에 대하여 토목·전기공사 실정보고 등에 따른 사업비 조정이 발생하여 이를 알려드리오니 추후 사업비 정산에 참고하시기 바랍니다.

■ 사업비 조정 현황

(단위:천원)

구 분		당초 사업비	조정 사업비	증·감	비 고
총사업비		36,470,000	36,822,700	증 352,700
	공사비	32,070,000	33,613,900	증 1,543,900	실정보고에 따른 공사비 증가분
	건설사업관리비 (감독권한대행)	2,820,000	1,628,800	감 1,191,200	낙찰차액 반영
	설계비	1,070,000	1,070,000	-
	건설사업관리비 (설계감리)	510,000	510,000	-

붙임 : 실정보고 현황 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	윤갑진		광역도로계획팀장	박영서		도로계획과장	07/19 하종현
협조자
시행	도로계획과-9258	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 10층 도로계획과	/
전화	02-2133-8088	/전송	02-2133-0763	/	yunis777@seoul.go.kr	/	부분공개(5)