문서번호	시설과-6723
결재일자	2018.7.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
문정주		송병욱	전결 07/19 유승효
협조
	주무관		윤걸

「수유6배수지 건설공사」

건설폐기물 발생에 따른 처리방안 검토 보고

2018.  7.

상수도사업본부

(시설안전부)

「수유6배수지 건설공사」

건설폐기물 발생에 따른 처리방안 검토 보고

기존 배수지 구조물 인접부 터파기 작업 중 예상치 못한 건설폐기물이 발생되어 원활한 후속 공정을 위한 처리방안을 검토하여 보고 드림.

사업개요

❍ 규    모 : 배수지 확충 3,100㎥(기존 3,000 ㎥ ⇒ 6,100㎥)

송배수관부설 500~600㎜, 연장 990m

❍ 기    간 : ’17. 12. 13.~’20. 5. 30.

❍ 도 급 비 : 2,667백만 원

❍ 시 공 사 : 영동건설㈜ 외 1개사

❍ CM 사 : ㈜한국종합기술 외 1개사

보고내용(건설사업관리자)

❍ 관련공문 : 낙산및수유6배수(감리) 제18-223호(’18. 7. 19.)

- 건설폐기물 발생에 따른 처리방안 실정보고 검토

❍ 기존 배수지 인접부 터파기 작업 중 예상치 못한 건설폐기물이 발생

- 발생 콘크리트  65㎥(150ton)

건설폐기물 발생 위치	건설폐기물 현황 사진

❍ 당초 본 공사 건설 폐기물 처리용역은 상수도관 부설 시 물량이 발생됨에 따라 2019년 발주 예정으로 현재는 해당업체 미선정 상태

❍ 공사 여유부지가 없는 상황에서 건설 폐기물 처리용역 계약 시까지 금회 발생 건설폐기물을 현장에 적치할 경우 후속 공정인 구조물 기초공사 공정 지연이 예상됨에 따라

❍ *************************************************************************

검토의견(공사관리관)

❍ *******************************************************************************************************************************************

- **************************************

****		* ********************************	* *************************************	* *******************************************	* *********************	* ***************************	* ************* **********
** *** ***	********	******	******	******	******	******	******
	**********	******	******	******	******	******	******
	****** ****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
******		*******	*******	********	********	*******	*******

※ **************************************

향후계획

❍ 본 공사 토공 정산시 건설폐기물 반출수량 반영

- 올바로시스템을 통해 건설폐기물 처리량 확인

붙임 : 건설사업관리자 실정보고 공문 1부.  끝.