투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	「잠실강수욕장 조성 타당성 검토 및 기본구상 용역」 변경계약 요청

『잠실강수욕장 조성 타당성 검토 및 기본구상 용역』에 대하여 원활한 과업 수행을 위해 계약기간 연장에 합의하고 붙임과 같이 합의각서를 통보하오니 변경계약을 체결하여 주시기 바랍니다.

1. 변경내용: 용역기간 연장

- 당 초: 2018. 5. 18. ~  2018. 7. 16.

- 변 경: 2018. 5. 18. ~  2018. 7. 31.

2. 변경사유

-“잠실강수욕장 조성 타당성 검토 및 기본구상 용역”추진에 따른 전문가 자문회의 및 내실 있는 용역 수행을 위해 용역기간 연장 필요

3. 지체상금: 미부과

붙임  1. 합의각서 1부.

2. 용역기간 연장 검토보고서 1부.  끝.

	공원부장
주무관	김민경		공원기획과장	우진택		공원부장	07/19 김인숙
협조자
시행	공원기획과-2218	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0844	/전송	02-3780-0745	/	sudamk@seoul.go.kr	/	부분공개(5)