문서번호	건축부-10164
결재일자	2018.7.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	건축총괄과장	건축부장	시설국장
김찬유	박범규	임인구	07/19 류훈
협 조
	상상산업팀장		고옥희
	열빛총괄과장		유병기
	조경시설과장		신용우

서울애니메이션센터 재건축 공사

설계용역 변경계약 검토보고

2018. 7.

도시기반시설본부

(건 축  부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	□

서울애니메이션센터 재건축 공사

설계용역 변경계약 검토보고

서울애니메이션센터 재건축 공사」설계용역 관련하여 설계자로부터 용역기간 연장 등 변경요청되어 검토 보고 드림.

Ⅰ		용역현황

□ 용 역 명 : 서울애니메이션센터 재건축공사 설계용역

□ 위    치 : 중구 소파로 126, 130

□ 규    모 : 지하4층, 지상3층, 연면적 15,900㎡

□ 주 용 도 : 개별 창작공간, 마켓컨벤션 등(복합용도)

□ 용 역 자 : ㈜공간종합건축사사무소

□ 용역금액 : 2,072,000천원

□ 용역기간 : 2017.02.24. ~ 2017.12.20

Ⅱ		추진경위

□ 2017.02.24. : 설계용역 계약 및 착수

□ 2017.03.16./13 : *****************

*****************************************

******************

□ 2017. 3월 ~ 7월 : 총괄건축가(4회)·외부전문가(3회) 자문 및 회의

□ 2017.07.19. : 시장님 재건축 외부디자인 컨셉 보고

□ 2017.11.04. : 서울애니메이션센터 재건축 사업 변경계획(시장방침)

□ 2018.01.31. : 계획설계 자문회의

□ 2018.07.17. : 설계용역 변경 계약 요청(공간종합건축)

- 연장 사유 : 운영기관(SBA) 요청사항 반영 및 계획설계 자문회의후 문화융합경제과           계획설계 변경, 공사비 조정 검토 기간 반영

- 조정 사유 : 설계공모당선 안 컵셉 및 내외부 디자인 전체 변경(건축계획 변경 등)

Ⅲ		변경 계약 검토

□ 관련근거

- 서울애니메이션센터 재건축사업 변경계획 방침(문화융합경제과-8131호, 2017.11. 4)

- 변경계약 용역 요청(공간 제2018-0307호, 2018. 7.17.)

□ 용역기간 및 용역비 조정

구 분	당 초	변 경	증·감
용역기간	*********************	*********************	*****
용 역 비	***********	***********	***********

- 연장사유 : 문화융합경제과 계획설계 및 운영기관(SBA) 변경요청

공사비 조정 검토 기간 반영 등

- 변경사유 : 설계공모 당선 안 컵셉 및 내외부 디자인 전체 변경 등

(적용근거:실비정액가산방식 적용)

□ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ		처리의견

□ 사업의뢰부서 계획설계 변경요청으로 용역 변경계약 시행하고자 함

□ 사업의뢰부서(문화융합경제과) 예산 재배정 요청

붙임 : 변경계약 요청 공문(설계자) 1부. 끝.