문서번호	건축부-10246
결재일자	2018.7.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축관리과장	건축부장
남광연		차무흥	07/20 임인구
협조

『시립노원청소년직업체험센터 건립공사』 폐기물처리 물량변경 검토보고

2018.  7.

도시기반시설본부

건축부

『시립노원청소년직업체험센터 신축공사』

폐기물처리 물량변경 검토보고

『시립노원청소년직업체험센터 신축공사』관련 건설사업관리단으로부터 철거공사 중 발생한 철거폐기물 및 터파기 공사 중 발생한 지중폐기물 처리 비용 증가에 대한 실정보고가 있어 검토보고함

1		사업개요

위    치 : 서울시 노원구 하계동 224-9 외 3

규    모 : 지하1층/지상3층, 연면적 3,299.76㎡ / 신축

공사기간 : 2017.11.16 ~ 2019.3.16.

시 공 사 : ㈜디에스종합건설 외 1개사 / 폐기물처리: ㈜ 진흥이엔티

감 리 자 : ㈜신한에이앤이

공 사 비 : ***************************************

2		실정보고 내용

관련문서

- 실정보고 검토보고(지중폐기물 발생에 따른 처리방안 검토보고)

[건축부-3954(2108. 3. 23.)]

- 실정보고(건설폐기물 물량정산 검토보고) [신한시노청 제2018-102호(2018. 7. 11.)]

관련규정

- 건설폐기물 처리용역 과업내용서 4. 설계변경, 6. 기타사항

실정보고 사유

- 지하 터파기 작업 중 지중 매립 폐기물이 토사와 혼합된 상태로 다량 발생하여 현장에 이동식스크린선별 장비를 투입하여 토사와 혼합된 지중폐기물을 선별한 후, 폐기물 처리함 {실정보고 승인[건축부-3954(2108. 3. 23.)], 설계변경 소위원회 [건축부-8169(2018. 6. 15.)]}

- 기존 건물 및 대지내 구조물 철거공사 1차 완료(인접 학교 담장 잔여분 철거는 신축공사 완료시점에 철거 예정)에 따른 폐기물 수량 정산 결과 혼합폐기물 및 소각폐기물이 기계약수량보다 증가됨

실정보고 내용 및 공사비 증감

- 신축분: 터파기공사 중 발생한 지중매립 폐기물처리비 **********************

품명	규격	단위	단가	수량			증감액	비고
				당초	변경	증감
건축폐기물	조적, 폐콘크리트	ton	******	*	****	****	***********	철거분 단가적용
건설폐기물	건축폐자재	ton	******	**	**	*	*
혼합건설폐기물	소각 5%이하	ton	******	**	***	***	**********
폐기물운반비	15톤덤프트럭, 30km	ton	******	**	****	****	***********
직접 공사비 소계							***********

*******************************

- 철거분: 철거공사 발생 폐기물처리비 **********************

품명	규격	단위	단가	수량			증감액	비고
				당초	변경	증감
건축폐기물	조적, 폐콘크리트	ton	******	****	****	*	*
혼합폐기물	수장재	ton	******	***	***	***	***********
소각폐기물	비닐, 천막, 스치로폼	ton	*******	**	**	*	********
임목폐기물	수목	ton	******	**	**	*	*
직접 공사비 소계							***********

- 폐기물 처리용역 계약변경 금액

구 분		금 액			비고
		당초	변경	증감
직접 공사비	폐기물처리(신축)	*********	**********	***********
	폐기물처리(철거)	**********	**********	***********
	직접공사비계	**********	***********	***********
부가가치세		*********	**********	**********
합 계		**********	***********	***********	**

예산 조치

********************************************

*******************************************************************************************

3		건설사업관리단 검토의견

당 현장 철거공사 및 토공사 중 추가 발생한 폐기물 처리에 대한 폐기물처리용역비 증액에 관한 사항으로 건설사업관리기술자 검토, 확인한 바 적정하다고 판단됨

용역비 증액에 따른 용역기간의 변경은 없으며 진행중인 신축분 및 실시예정인 철거분(인근 학교 경계담장)에 대해서는 추후 공사 시행 후 정산처리 예정임

4		처리의견

책임건설사업관리자의 검토 결과 관련규정 및 현장 여건에 적합한 것으로 판단되어 상기 보고 내용과 같이 건설폐기물처리용역 계약변경을 시행하고자 함

붙 임 :  실정보고(건설폐기물 물량정산 실정보고) 검토 요청 1부.  끝.