문서번호	산지방재과-7093
결재일자	2018.7.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		사면정비팀장	산지방재과장
손창민		정상모	07/20 김영삼
협 조
	주무관			신정림

- 시민의 숲 교양시설 조성공사 -

준공기한 연기 검토 보고

2018. 07.

푸른도시국

(산지방재과)

- 시민의 숲 교양시설 조성공사 -

준공기한 연기 검토 보고

「시민의 숲 교양시설 조성공사」와 관련하여 우면산 산사태 희생자 추모행사를 도급공사에 포함하여 지원함에 따라 본 공사의 준공기한을 연기하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

○ 우면산 산사태 희생자 7주기 추모행사 계획[산지방재과-7061호(2018.7.19.)]

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 시민의 숲 교양시설 조성공사

○ 위    치 : 서초구 양재동 시민의 숲

○ 공사기간 : 2018. 5. 29. ∼ 2018. 7. 27.

○ 도 급 비 : 금150,625,300원

○ 도 급 자 : ㈜그린포엘 대표 김미후

○ 공사규모 : 추모비 설치 1개소, 목재데크 112㎡, 파고라 설치 1개소 등

□ 검토내용

○ 준공기한 연기사유

- 우면산 산사태 희생자 7주기 추모행사(2018.7.27.예정)를 본 공사의 도급공사에 포함하여 지원키로 함에 따라 본 공사의 공사기한 연장이 필요함

○ 준공기한 연장

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한	2018.5.29.~2018.7.27.	2018.5.29.~2018.8.10.	증 14일

○ 연기에 따른 귀책소재 : 서울시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 조치계획

○ 상기와 같이 준공기한을 연장하여 공사추진 및 행사진행에 차질이 없도록 만전을 기하고자 함

붙  임 : 우면산 산사태 희생자 7주기 추모행사 계획 1부.  끝.