문서번호	토목부-12830
결재일자	2018.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		도시고속도로과장	토목부장
노순재		명경출	07/23 김영수
협조
	주무관		김동현

교각7 구조형식 변경(콘크리트→강구조물) 실정보고

(중랑천 초안산 앞 보행교량 설치 공사)

2018. 7.

도시기반시설본부

(토 목 부)

교각7 구조형식 변경(콘크리트→강구조물) 실정보고

- 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 -

철도보호지구내 설치되는 교각7에 대하여 야간 콘크리트 타설이 어려워 강구조물로 변경하는 실정보고 사항에 대한 검토 보고임

※ 관련근거 : 대콘(초안산) 제18-69호(‘18. 06. 12.)

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

○ 공사규모 : 보행교량 설치(폭 4.5m, 연장 191m)

○ 도 급 비 : 8,813백만원(3차: 4,173백만원)

○ 공사기간 :′16.4.29 ~ ′18.11.30

○ 시 공 사 : 한양산업개발㈜

○ 감 리 사 : ㈜대한콘설탄트외 1

Ⅱ		실정보고 내용

○ 교각7 형식변경(콘크리트구조물 → 강구조물)

- 교각7은 철도레일과 매우 근접하여 철도보호지구내 행위신고 사항에

따라 야간(01:30~04:30)에만 공사가 시행되어야 하나,

- 레미콘(관급자재) 업체에서 야간출허가 불가하고, 작업시간이 짧아

안전 및 품질관리에 어려움이 많아 강구조물로 변경이 필요한 실정임

○ 추진경위

- 토목부-8031호(2018.05.10) [ 도시기반시설본부 ￫ 한국철도시설공단]

“지하철1호선(월계역) 철도보호지구에서의 행위신고” ⇨ 야간공사 시행

- 대콘(초안산)제18-149호(2018.06.05) [건설사업관리단 ↔ ㈜정선]

“레미콘(관급자재)야간수급 여부 문의에 대한 회신” ⇨ 야간공급 불가

- 대한(감본)18-115호(2018.06.12) [기술지원기술자 ￫ 건설사업관리단]

“교각7 변경에 대한 기술지원기술자 구조검토 완료” ⇨ 강구조 가능

○ 평면도 및 철도보호지구 현황

철도선로

교각7

평   면  도

철도안전법 제45조에 따른 철도보호 지구 간섭현황

○ 현황사진

○ 형식변경 검토

구 분	당 초 (철근콘크리트)	변 경 (강재)
형 식
공사비	도급공사비 : 31,383,000원 관급자재비 : ) 7,500,000원 공사비 계 : 38,883,000원	도급공사비 : 86,262,000원 [(증)54,879,000원] 관급자재비 : 4,400,000원 [(감)3,100,000원] 공사비 계 : 90,662,000원 [(증)51,779,000원]
공사 기간	약 4개월 소요 [7월∼10월] [마이크로파일40일, 구조물 70일] - 콘크리트타설 5회 (철근조립 및 타설 : 일3∼4시간 기준 14일 적용)	약 2개월 소요 [7월∼8월] [마이크로파일40일, 구조물 20일] - 강 구조물 제작(상부공 제작 일정에 포함)
장 점	· 공사비 변동없음	· 주간 공사를 시행하여 품질성 확보 · 주간공사를 시행하여 야간공사대비 안전성 확보 · 품질성 확보
단 점	· 공사기간이 증가 · 주간공사 대비 안전성 확보 어려움 발생 · 야간공사 시행으로 품질저하 발생 우려 · 야간 레미콘 수급 불가	· 철근 콘크리트 대비 공사비가 고가
시공 사례	· 일반적 교각	· 철도구간, 복잡한 도심 교차로 등 주간 작업이 불가능하고 야간작업시 긴급을 요하는 공사에 적용 - 조치원역 환승센터, 한남대교 교차로 (사진대지참조)

○ 비상주(구조검토) 의견

- 교각7은 전철과 매우 인접하여 작업공간이 협소하고, 콘크리트 타설이

어려워 강구조물로 변경이 필요하고, 구조검토 결과 안전성 확보

Ⅲ		수량 및 단가검토

○ 변경 수량 및 금액                                     (단위: 천원)

구 분	규 격	단위	수 량		(증.감)	비 고
			당 초	변 경
강교제작 및 가설		ton	-	10.557	10.557
강교 도장			-	224	224
용접 검사			-	36	36
거푸집	원형및거푸집	㎡	88	52	- 36
비계	3개월	m	281	86	- 195
동바리	구조물	공/㎡	51	-	- 51
철근가공	매우복잡	ton	5.282	2.463	- 2.819
스페이서		㎡	99	41	- 58
레미콘타설		㎥	46	35	- 11

※ 기존단가(강교) 적용

○ 공사비 증감

구 분	당 초	변 경	(증 . 감)
도 급 액	31,383,000	86,262,000	54,879,000
관 급 자 재 비	7,500,000	4,400,000	-3,100,000
공 사 비 계	38,883,000	90,662,000	51,779,000

Ⅳ		조치계획

○ 콘크리트 교각7에 대하여 레미콘 수급불가 및 안전성, 공정, 품질관리를

위하여 강재교각으로 변경코자 하는 건설사업관리단 실정 보고 사항을 승인

조치하고 추후 설계변경 소심의 후 내역에 반영코자 함

붙  임 : 건설사업관리단 검토 의견서 1부. 끝.