문서번호	설비부-10108
결재일자	2018.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	환경설비과장
김현욱	07/23 여인웅

『천호대로(광나루역) 확장 전기공사』

설계변경 소위원회 자문요청

2018. 7.

도시기반시설본부

[설 비 부]

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		설비부		요청일	2018년 07월 일
공 사 명	천호대로(광나루역) 확장 전기공사
공사개요	공사규모		- 위 치 : 서울시 광진구 광장동 (천호대로) - 규 모 : 수변전설비 1식, 전력간선설비 1식, 전등전열설비 1식 등
	공사기간		2011. 06. 16 ～ 2018. 12. 20.
	감 리 사		㈜수성엔지니어링
	설 계 사		㈜대한콘설탄트
	시 공 사		㈜거성전설
심의안건명			설계변경에 의한 금액증액			요청금액	증 240,537천원
심의요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 요청 ▢ 운반거리 변경
설계변경사항(요약) ◯ 내용: 1) 경관개선공사 변경에 따른 설계변경 2) 기류휀 제어반 및 수경설비 계량기함 설치 3) CCTV 및 비상벨 설치에 따른 설계변경 4) 상징조형물 설치에 따른 설계변경
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 주요변경내용 1) 경관개선 변경에 따른 설계변경 2) 기류휀 제어반 및 수경설비 계량기함설치 3) CCTV 및 비상벨 설치에 따른 설계변경 4) 상징조형물 설치에 따른 설계변경					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 1,399,255천원 - 변 경 : 1,639,792천원 - 증 감 : 240,537천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 상징조형물 설치 - CCTV 및 비상벨 설치

▪ 주요변경내용                                                                              (단윈 천원)

구분	공 종	당초 금액	변경 금액	증 . 감	변 경 사 유	설계 변경내용 요약
1	수배전공사	25,728	34,722	8,994	기류휀 제어반설치	▷ 기류휀제어반 설치에 따른 설계변경
2	지하차도전기공사	250,582	250,582	0
3	통로박스 조명설비공사	59,912	59,912	0
4	가로등 설비 및 광통신 관로공사	111,344	111,344	0
5	신호등설비 이설공사	1,087	1,087	0
6	통로박스 환기휀 설비공사	72,462	72,462	0
7	5호선 터널환기구 전등설비공사	482	482	0
8	기타부대공사	129,342	129,342	0
9	라디오재방송	76,974	76,974	0
10	경관개선공사 -가로등설비	25,077	27,679	2,602	분전반	▷ 가로등분전반 사급으로 변경
11	경관개선공사 -수경시설동력 설비공사	7,836	9,768	1,932	한전저압수전	▷ 수경시설 계량기 설치에 따른 변경
12	경관개선공사 -경관등 설비공사	47,447	61,024	13,577	현장여건에 따른 물량조정	▷ 현장 여건변경에 따른 설계변경
13	CCTV 및 비상벨 설치공사	0	70,237	70,237	CCTV 및 비상벨설치	▷ 터널상부 CCTV 및 비상벨 설치에 따른 설계변경
14	상징조형물 설치공사	0	77,642	77,642	상징조형물 설치	▷ 상징조형물 설치에 따른 설계변경
15	ESC 정산	121,410	121,410	0
소 계		929,683	1,104,667	174,984
제 경 비 등				65,553
도 급 공 사 비				240,537

첨부서류

설계변경 심의요청 자료 1부

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	천호대로(광나루역)확장 전기공사
계약금액	1,399,255,000원	계약일	2011. 06. 16	시공사	(주)거성전설
공사기간	2011. 06. 16.～2018. 12. 20.	낙찰율	86.745%	설계자	㈜대한컨설탄트
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사( )			감리자	㈜수성엔지니어링
공사규모	- 위 치 : 서울시 광진구 구의동58-15 ~ 광장동388-10 - 규 모 : 변전설비 1식, 전력간선설비 1식, 전등전열설비 1식 등			※ 작성자 : (☎)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후(추가공사)	비 고
변 경 개 요	기류휀 제어반 (토목) 수경시설 동력설비		기류휀 제어반 (전기) 1면 상부 CCTV 및 비상벨 5대 수경시설 한전저압수전 상징조형물 1식
공 사 비	1,399,255,000원		1,639,792,000원	240,537,000원
적 용 요 율	86.745%		낙찰율 86.745%
설계변경요구자	☑ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	낙찰율 적용
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행
설계변경 근거	방 침	설비부-
	관련규정	공사계약일반조건 제6절 1.설계변경
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 요청 ⑨ 운반거리 변경
설계변경 내용	1) 경관개선 변경에 따른 설계변경 2) 기류휀 제어반 및 수경설비 계량기함설치 3) CCTV 및 비상벨 설치에 따른 설계변경 4) 상징조형물 설치에 따른 설계변경
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진