위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(시민의 숲 교양시설 조성공사)

우리시에서 시행중인 「시민의 숲 교양시설 조성공사」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 시민의 숲 교양시설 조성공사

나. 공사기간 : 2018.5.29.~2018.7.27.

다. 도 급 비 : 금150,625,300원

라. 도 급 자 : ㈜그린포엘 대표 김미후

마. 준공기한 변경내역

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
준공기한	2018.5.29. ~ 2018.7.27.	2018.5.29. ~ 2018.8.10.	증)14일

- 변경사유 : 붙임 준공연기의뢰서 참조

라. 예산과목 : 푸른도시국 산지방재과, 산림안전관리, 산림재해방지, 사방사업(우면산 산사태 희생자 추모비), 시설비(100-401-01)

붙임  1. 준공기한 연기 검토 보고 1부.

2. 준공연기의뢰서 1부.  끝.

	산지방재과장
주무관	손창민		사면정비팀장	정상모		산지방재과장	07/23 김영삼
협조자
시행	산지방재과-7117	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 서울익스체인지빌딩 산지방재과(8층) (무교동)	/
전화	02-2133-2188	/전송	02-2133-1080	/	smin8304@seoul.go.kr	/	부분공개(5)