문서번호	시설과-4533
결재일자	2018.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
전문관	주무관	시설과장
강명식	代백강석	07/23 오임석

사회적약자 이용 음수대 납품기한 연기 보고

2018. 7.

서울대공원

(시설과)

사회적약자 이용 음수대 납품기한 연기 보고

음수대 설치 전 진입로 및 기초 공사의 일정에 따라 음수대 납품 및 설치 기한을 조정하고자 함.

Ⅰ

사업개요

공 사 명	납품기한	계약금액(원)	계약자	비고
사회적약자 이용 음수대 제작구매 설치	2018.6.29. ∼ 7.29.	35,805,200	㈜에코수 엔지니어링	현 장 설치도

Ⅱ

추진 경위

❍ 2018. 3. 9. : 음수대 교체공사 계획 방침(시설과-1263)

❍ 2018. 3.26. : 디자인 및 공사 관계자 회의(시설과-1630)

❍ 2018. 4. 9. : 음수대 추진 보고(시설과-1990)

❍ 2018. 5.29. : 음수대 구매 계약심사 의뢰(시설과-3213)

❍ 2018. 6. 7. : 음수대 구매 계약 의뢰[전자공개수의계약](시설과-3454)

❍ 2018. 6.29. : 음수대 계약 체결(총무과-6469)

Ⅲ

연기사유

납품기한 연기 사유

❍ 사회적약자 이용 음수대 구매제작 설치 계약은 현장설치도 검수.

❍ 토목공사기간 : 2018.7.18.∼9.15.

❍ 음수대 바닥 토목공사 공정과 연계하여 납품기한 내 설치 불가.

Ⅳ

조치의견

의견 : 상기 사유로 납품기한 연기

공 사 명	변경사항		비고
	변경 전	변경 후
사회적약자 이용 음수대 제작구매 설치	’18.6.29.∼7.29.	’18.6.29.∼8.24.	현 장 설치도

귀책책임 : 서울대공원.(지체상금 미부과).

납품기한을 연기하여 사회적약자 이용 편의를 위한 음수대 설치에

만전을 기하고자 함.  끝.