문서번호	설비부-10156
결재일자	2018.7.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
손영일		임병국	07/23 권오식
협조

「서울바이오허브 조성(2단계)전기공사[1차]」

설계변경(정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 7.

도시기반시설본부

[설 비 부]

「서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사[1차]」

설계변경(정산) 검토 보고

우리본부에서 시행중인「서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사[1차]」의 책임건설사업관리단의 설계변경 요청사항에 대하여 검토하고   아래와 같이 보고드림.

1		현 황

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사

○ 규    모 : 신관동(대수선) 지하1층/지상5층, 연면적 3,216㎡, 연구시설

별관동(신축)   지하2층/지상4층, 연면적 3,112㎡, 연구시설

○ 도 급 액 : 1차 250,000,000원 (총차 2,474,972,760)

○ 공사기간 : 1차 ‘17.09.28. ~ ’18.07.31. (총차 `17.09.28. ~ `19.02.27.)

○ 시 공 사 : 대영이엔티(ENT) 대표 이현정 외 2개사

○ 감 리 단 : ㈜한국종합건축사사무소

□ 관련근거

○ 서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사[1차] 계약내역변경 검토보고

[한종홍릉 제2018-809호, 2018.07.23.]

2		설계변경 검토

□ 설계변경 사유

○ 옥외보안등공사 등 기간내 시공이 어려운 공정을 2차로 변경하고        트레이배관 등 2차 기완료된 물량 일부를 1차내역에 추가

○ 1차수 보험료(건강, 연금, 노인장기요양보험료) 정산

□ 공종별 설계변경(정산) 내역                       (단위: 원)

공 종	당 초	변 경	증‧감	비고
전열공사(신관)	24,652,541	27,440,550	증) 2,788,009
전등공사(신관)	11,686,212	33,886,311	증) 22,200,099
피뢰및접지공사(신관)	10,469,778	12,066,808	증) 1,597,030
케이블트레이(신관)	1,680,762	18,985,578	증) 17,304,816
옥외보안등공사(신관)	28,820,880	0	감) 28,820,880
피뢰및접지공사(별관)	35,055,070	19,634,607	감) 15,420,463
보험료 정산(건강,연금 ,노인장기요양)	4,522,058	0	감) 4,522,058

□ 설계변경 금액                                    (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증‧감	비고
1 차	250,000,000	250,000,000	0	공사금액 변경없음
총 차	2,474,972,760	2,474,972,760	0	〃

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 총차 변경없이 현장 여건을 감안한 1차 공사내역 조정으로 계약변경이 적정하다고 판단됨.

3		보고자 의견

○ 본 공사 건설사업관리단의 기술의견사항을 검토한 결과, 적정한 것으로 판단되어 설계변경(내역조정) 처리하고 계약부서에 계약변경 의뢰하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리단 공문 1부. 끝.