투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(물가변동으로 인한 계약금액 조정(E-S) 신청 실정보고 승인)

1.업무지시현장 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업[장기계속-1차] 주식회사

천일, 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업[장기계속-1차] 동

부엔지니어링 주식회사

2.작 성 일 자 : 2018-07-23 09:07:10

3.지 시 내 용

: 1. 중랑 감 제 18-163호(2018. 7.16)와 관련입니다.

2.『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 감독 권한대행 등 건설사업관리용역』관련 물가변동으로 인한 계약금액 조정(E/S, 제1회) 신청 건에 대하여 책임건설사업관리기술자 검토의견대로 승인처리 하오니 변경계약 시 정산 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 총괄 : (증)68,430,000원(3.89%)

나. 1 차 : (증) 9,390,000원(3.89%).  끝.

끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

전문관							조양호			환경시설과장					장수철					방재시설부장					07/23 이임섭
협조자
시행			방재시설부-9545									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층															/
전화		02-3708-8784						/전송			02-3708-8756					/	cyh2466@seoul.go.kr												/	대시민공개