투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결 - 잠실 강수욕장 조성 타당성 검토 및 기본구상 용역

1. 공원기획과-2218(2018.7.19.)호와 관련입니다.

2.「잠실 강수욕장 조성 타당성 검토 및 기본구상 용역」건에 대하여 다음과             같이 변경 계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약현황

용 역 명	잠실 강수욕장 조성 타당성 검토 및 기본구상 용역
계약상대자	프로젝트이음㈜ (대표 : 이효진)
계 약 금 액	금38,000,000원(금삼천팔백만원)
계 약 일 자	2018.05.18.
용 역 기 간	2018.05.18. ~ 2018.07.16.

나. 변경계약일자 : 2018.07.16.

다. 변경내역 : 기간 변경(2018.05.18. ~ 2018.07.31.)

변 경 내 역	변경전	변경후
기 간 변 경	2018.05.18. ~ 2018.07.16.	2018.05.18. ~2018.07.31.

라. 변경사유 : 전문가 자문회의 및 내실 있는 용역 수행을 위해 용역기간 연장.

붙   임 : 1. 용역변경계약서 1부.

2. 변경계약보증서 1부.

3. 변경계약선금보증서 1부.

4. 계약의뢰 1부.  끝.

5. 용역 계약 조건 및 관련 예규 1부.  끝.

주무관	주홍열		총무과장	박병현		총무부장	07/23 박기용
협조자
시행	총무과-10014	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(5)