문서번호	공간정보담당관-7113
결재일자	2018.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보구축팀장	공간정보담당관
최지혜		서미연	07/24 최영창
협조

2018년 항공사진 DB구축 및 기능개선 사업 주간업무(7월 3주) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
공간정보담당관-1154(2018.2.1.)				300,000천원

2018. 7.

공간정보담당관

2018년 항공사진 DB구축 및 기능개선 사업

주간업무(7월3주) 보고

사업명			2018년 항공사진 DB구축 및 기능개선 사업
사업기간			‘18.6.12.~‘18.12.31.	담 당		공간정보담당관 최지혜
사업비			300,000천원	업체/PM		삼아항업㈜ 컨소시엄 마성진 차장
보고기간			‘18.7.16.~‘18.7.20.	전체공정율		계획 0.81% / 실시 0.81%
주요내용			1. 과거년도 항공사진 기무사 보안처리 2. 정확도 개선 항공사진 영상 분석
구분	금 주 실 적 (2018.07.16 ~ 2018.07.20)				차 주 계 획 (2018.07.23 ~ 2018.07.27)
사업 관리	6주차 주간보고 2. 항공사진 DB 정확도 개선(작업범위 변경) - 변경 요청승인서, 변경관리대장 작성 및 제출				7주차 주간보고 1982년 1차분 시스템 반영 TEST 일정 협의
DB 구축
정확도 개선	과거년도 항공사진 기무사 보안처리 - 75회차(2006년1차) : 33% 완료 - 77회차(2007년) : 66% 완료 - 83회차(2013년) : 22% 완료				1. 과거년도 항공사진 기무사 보안처리 - 75회차(2006년1차) : 7월 31일 완료 예정 - 77회차(2007년) : 7월 27일 완료 예정 - 83회차(2013년) : 8월 9일 완료 예정 2. 기무사 보안처리 완료본 내부 검수 - 육안검수 진행
S/W 개발	변경과업 범위 항공사진 영상 인수 (`72년 1차, `81년 2차, `82년 1차, `88년 2차, `89년 1차) 2.. 1982년 1차 항공사진 영상 분석 및 확인				사진기준점 측량을 활용한 정확도 개선 - 1982년 1차 작업 착수
특이 사항	정확도 개선 사업 1982년 1차 41코스 26번 사진 오류 (재스캔 필요) - 첨부 1.