문서번호	설비부-10225
결재일자	2018.7.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
이동훈		김은덕	07/24 권오식
협조

동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사

실정보고 사항 검토 보고(1회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 07.

도시기반시설본부

(설 비 부)

동작대로 연장 중앙버스 전용차로 설치 전기공사

실정보고 사항 검토 보고(1회)

『동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사』와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 실정보고 사항에 대하여 검토하고 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사

□ 공사규모 : 가로등 이설 19본, 신호등주 설치 14본, 신호 제어기 4면

□ 공사기간 : `17.12.11. ~ `18.8.31.

□ 도 급 비 : 777백만원

□ 계 약 자 : ㈜삼영기업

□ 건설사업관리단 : ㈜동성엔지니어링

Ⅱ		검토내용

□ 관련근거

○ `18.07.18. : 제1회 실정보고 검토결과(동작건 제2018-109호)

□ 주요내용

○ 가로등 4본 추가 이설 및 분전반 1면 신설

구 분	규 격	단위	당 초	변 경	증․감	소요예산(원)
가로등이설	12m	본	2	6	증)4	2,660,232
케이블설치	CV10×1C 외	m	1,252	1,371	증)119	1,005,326
전선관설치	PE42	m	769	884	증)115	4,376,210
방수접속함	ELB내장형	개	27	31	증)4	244,424
굴착배관 등	소형고압굴착 외	m	767	872	증)105	1,439,235
분전함	4회로	개	2	3	증)1	671,741
제경비						5,546,242
합 계						15,943,410

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 토목작업(Set Back)구간 증가에 따른 가로등 4본 추가 이설 및 쉘터조명용 별도 분전반 신설(서초구 요구사항)을 반영하는 것이 타당한 것으로 판단

Ⅲ		조치의견

○ 건설업관리단 실정보고 요청사항 검토 결과 적정한 것을 판단되어 우선 시공후 추후 설계변경시 계약변경하고자 함

붙 임 : 관련문서 1부.  끝.