문서번호	설비부-10226
결재일자	2018.7.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
이동훈		김은덕	07/24 권오식
협조

동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사

실정보고 사항 검토 보고(2회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 07.

도시기반시설본부

(설 비 부)

동작대로 연장 중앙버스 전용차로 설치 전기공사

실정보고 사항 검토 보고(2회)

『동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사』와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 실정보고 사항에 대하여 검토하고 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사

□ 공사규모 : 가로등 이설 19본, 신호등주 설치 14본, 신호 제어기 4면

□ 공사기간 : `17.12.11. ~ `18.8.31.

□ 도 급 비 : 777백만원

□ 계 약 자 : ㈜삼영기업

□ 건설사업관리단 : ㈜동성엔지니어링

Ⅱ		검토내용

□ 관련근거

○ `18.07.18. : 제2회 실정보고 검토결과(동작건 제2018-108호)

□ 주요내용

○ 훼손 검지기 등 원인자 복구(재설치) 추가 반영

구 분	규 격	단위	당 초	변 경	증․감	소요예산(원)
서울시 시설관리공단	검지선 (교통량 측정)	개	0	10	증)10	7,690,225
서울시 교통정보과	단속장비 이설 (버스전용차선)	개소	0	1	증)1	14,840,830
서울경찰청 영상단속실	검지선 (신호, 과속)	m	0	24	증)24	31,726,038
	단속장비 이설 (신호, 과속)	개소	0	1	증)1
서울경찰청 신호운영실	검지선 (교통신호 제어)	개	0	9	증)9	28,280,687
제경비, 시험비 등	-					52,856,420
합 계						135,394,200

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 토목공사의 기존 차도부 재포장(절삭) 및 중앙버스전용차로 신설로 인해 훼손된 검지기의 재설치 및 무인단속장비 이설을 반영하는 것이 적정한 것으로 판단

Ⅲ		조치의견

○ 건설업관리단 실정보고 요청사항 검토 결과 적정한 것을 판단되어 우선 시공후 추후 설계변경시 계약변경하고자 함

붙 임 : 관련문서 1부.  끝.