문서번호	설비부-10227
결재일자	2018.7.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
이동훈		김은덕	07/24 권오식
협조

동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사

실정보고 사항 검토 보고(3회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 07.

도시기반시설본부

(설 비 부)

동작대로 연장 중앙버스 전용차로 설치 전기공사

실정보고 사항 검토 보고(3회)

『동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사』와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 실정보고 사항에 대하여 검토하고 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사

□ 공사규모 : 가로등 이설 19본, 신호등주 설치 14본, 신호 제어기 4면

□ 공사기간 : `17.12.11. ~ `18.8.31.

□ 도 급 비 : 777백만원

□ 계 약 자 : ㈜삼영기업

□ 건설사업관리단 : ㈜동성엔지니어링

Ⅱ		검토내용

□ 관련근거

○ `18.07.18. : 제3회 실정보고 검토결과(동작건 제2018-110호)

□ 주요내용

○ 교통신호기 물량 변경 - 보도후퇴(Set Back) 및 사업소 승인사항 적용 등

구 분	규 격	단위	당 초	변 경	증․감	소요예산(원)
사당삼성생명	보행지주 이설	본	0	1	증)1	631,641
사당역	디자인지주(250A)로 변경	본	0	1	증)1	2,042,988
서울전자고등학교	디자인지주(300A) 이설	본	0	1	증)1	1,771,182
정각사입구	가공→지중 전선관배관	m	0	9	증)9	10,638,693
사당역정류장 외	버스전용신호등 설치	개소	0	13	증)13	5,443,087
이수역 외	맨홀(800*800*800)설치	조	16	18	증)2	3,409,082
제경비						10,988,327
합 계						34,925,000

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 보도후퇴(Set Back) 및 남부도로사업소 승인사항 적용 등으로 가공케이블의 지중매설 및 교통신호지주 및 부착대 길이 조정 등을 반영하는 것이 적정한 것으로 판단

Ⅲ		조치의견

○ 건설업관리단 실정보고 요청사항 검토 결과 적정한 것을 판단되어 우선 시공후 추후 설계변경시 계약변경하고자 함

붙 임 : 관련문서 1부.  끝.