급수공사 변경사항 보고(*************)

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	홍성철	문병희	07/24 박은선

명에 의거 담당동 급수공사 수행 중 『2018년 등촌1동외 8개동 상수도 공사』와 관련하여 급수공사의 변경요청이 있어, 현장 조사 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 현    황

○ 공사 위치 : 강서구 ************* (건축주 ***)

○ 건물 용도 : 공동주택 및 근린생활시설

○ 급수공사 승인 : 시설관리과-10638(2018.6.12.)

· 가정용 : 주계량기 D30mm 1개소, 자계량기 D15mm 10개소

· 일반용 : 주계량기 D25mm 1개소, 자계량기 D15mm 4개소

○ 급수공사비 부과현황

- 공사비 : 4,491,000원 (일반용 벽체계량기 설치 실공사비 포함)

- 원인자부담금 : 4,416,000원

- 합계 : 8,907,000원

□ 보고내용

○ 자계량기 미설치에 따른 급수공사비 변경 적용

- 해당 건물의 용도는 단독주택(다중주택) 및 근린생활시설로, 최초 신청시 각 호별 벽체계량기 설치를 포함하여 공사비를 산출하였으나, 민원인의 요청으로 가정용 및 일반용 독립계량기 각 1개소를 설치하는 것으로 변경 적용하고자 함.

구분	당초	변경	증감	비고
공사비	4,491,000원	2,412,650원	-2,078,350원
원인자부담금	4,416,000원	1,473,000원	-2,943,000원
총 공사비	8,907,000원	3,885,650원	-5,021,350원

○ 민원인 사정에 의한 납부지연에 따른 납부기한 연장

- 당초 납부기한 : ~ 2018.6.27.

- 변경 납부기한 : ~ 2018.8.7.

□ 행정사항

○ 요금과에 급수공사비 변경고지의뢰 및 납부기한 연장요청

붙 임 : 변경공사비 산출내역 1부.  끝.