문서번호	시설과-1712
결재일자	2018.7.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	송복식	진병규	07/24 안수연
협 조

『서울고등법원 서관 옥상녹화·텃밭조성 사업』

실시설계 용역 준공 보고

2018. 7.

동부공원녹지사업소

(시설과)

『서울고등법원 서관 옥상녹화·텃밭조성 사업』

실시설계 용역 준공 보고

서울고등법원 서관 옥상녹화 텃밭조성 사업 실시설계 용역이 완료되어 아래와 같이 보고 드림.

□ 용역 개요

❍ 용 역 명 : 서울고등법원 서관 옥상녹화·텃밭조성 사업 실시설계 용역

❍ 위    치 : 서초구 서초중앙로 157(서울고등법원 서관)

❍ 사 업 비 : 350백만원(시지원액:175백만원, 자부담액:175백만원)

❍ 용역기간 : 2018. 4. 27. ~ 7. 20.

❍ 도 급 자 : *************

❍ 계약금액 : 금13,300,000원

□ 추진 경위

❍ 2018.01.24 : 2018년 옥상녹화 텃밭조성 계획 시달(市조경과→동부)

❍ 2018.01.24 : 옥상녹화사업 협약서 및 동의서 발송

❍ 2018.01.29 : 기술용역 타당성 심사 결과 통보(적정)

❍ 2018.04.13 : 건축물 구조안전진단 용역 계약

❍ 2018.04.16 : 자부담금 입금(서울고등법원→동부)

❍ 2018.04.22 : 건축물 구조안전진단 용역 준공

❍ 2018.04.27 : 실시설계 용역 계약

❍ 2018.05.04 : 계획안 보고(동부공원녹지사업소)

❍ 2018.05.08 : 계획안 1차 협의(서울고등법원)

❍ 2018.05.24 : 계획안 2차 협의(서울고등법원)

❍ 2018.06.05 : 계획안 3차 협의(서울고등법원)

❍ 2018.06.18 : 계획안 4차 협의(서울고등법원)

❍ 2018.06.29 : 서울시(조경과) 설계심의

❍ 2018.07.10 : 계획안 최종 협의(서울고등법원)

❍ 2018.07.20 : 용역 준공

❍ 2018.07.23 : 서울시설공단 감독의뢰 및 도서 검토 요청

□ 설계심의 결과

❍ 일    시 : 2018.06.29.(금) 10시30분

❍ 장    소 : 푸른도시국 회의실

❍ 심의내용 : 사업목적 및 취지의 적합성, 디자인 등 설계 전반 등

❍ 주요내용

심의내용	조치결과	비고
********** ****************************** ***********************************	************* **************************	**
*****************************************************************	**********************	**
**************************************************************************************	*********** ****************	**
*****************************************************************	**************** *******************	****
*********************************************************************** ***************************************	****************************************************	**
*****************************************************	*********** ******* ******************	**
************************************************ ***************************************	**********************************	***
*************************************************** *********************	***************	**
********************************************	********** ********************	**

심의내용	조치결과	비고
********************************************************************	***************	**
************************** ****************************************	*************************************	**
************************************************************************	******************** *****************	**
***************************************************************	********	**
************************************************* *************************	**************************** **********************	**
*******************************************************************	**********************************	**

□ 향후 계획

❍ 계약부서(공원운영과)에 준공 통보 및 준공처리

❍ 서울시설공단 도서검토 후 원가계약 심사 요청

□ 향후 추진 일정

❍ 2018. 07. 27   : 준공 통보 및 준공처리(→공원운영과)

❍ 2018. 08.       : 원가계약 심사 요청(→계약심사과)

❍ 2018. 08.       : 예산 재배정 요청(→조경과)

❍ 2018. 08.       : 공사 발주

❍ 2018. 09. ~ 11 : 공사 시행 및 준공

❍ 2018. 12.       : 시설물 인계(→서울고등법원)

붙임 : 보고자료 1부.  끝.