투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사 [1차] 계약변경 의뢰

1. 설비부-10156(2018.07.23.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 추진중인 『서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사[1차]』와 관련하여 아래와 같이 계약변경 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사[1차]

나. 계 약 자 : 대영이엔티(ENT) 대표 이현정 외 1개사

다. 변경사항

변경내용	구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
계약금액	1 차	250,000,000원	250,000,000원	내역변경
	총 차	2,474,972,760원	2,474,972,760원	변경없음

라. 변경사유

- 기간내 시공이 어려운 공정을 2차로 변경하고, 트레이배관 등 2차 기완료된 물량         일부를 1차내역에 추가

- 1차공사분의 건강,연금,노인장기요양보험료 정산

붙임 : 1. 검토보고서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 변경도서 1부. 끝.

	설비부장
주무관	손영일		시책사업과장	임병국		설비부장	07/24 권오식
협조자	경리과장	이현숙
시행	설비부-10189	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스B/D 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8650	/전송	02-3708-8659	/	zerone@seoul.go.kr	/	부분공개(6)