문서번호	시설과-3331
결재일자	2018.7.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	조경팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
송재민	이무림	代이무림	07/25 박미애
협 조
	재무팀장		김기중

『한강진역 산책로 및 팔각광장 보행로 정비사업』

설계변경 및 정산 검토 보고

2018. 7.

중부공원녹지사업소

(시설과)

『한강진역 산책로 및 팔각광장 보행로 정비사업』

설계변경 및 정산 검토보고

『한강진역 산책로 및 팔각광장 보행로 정비사업』에 대하여 현장 여건 반영 및 품질향상을 위해 설계변경 하여 조성하고자 함.

공사현황

공 사 명 : 한강진역 산책로 및 팔각광장 보행로 정비사업

총공사비 : 금264,040,760원(금이억육천사백사만칠백육십원)

- 도급비 : 160,123,100원, 관급비 : 103,917,660원

공사기간 : 2018. 5. 31. ~ 7. 29.

도 급 자 : ㈜한설그린 대표 옥승엽

주요 설계변경 내용

구 분	변 경 내 용	비 고
식재공사	▶ 이식 공사 물량 변경 - 통행에 방해되는 벚나무(R20) 1주 이식 - 데크 계단 조성 구간 관목(회양목 등)이식 물량 증 : 40주	증감사항 반영
시설물 정비	▶ 한강진역 기존 데크(목재) 재사용 불가에 따른 물량 변경 - 데크 재사용 불가에 따른 목재폐기물량 증(8.031t -> 16.032t) - 목재(멀바우) 물량 증(321㎡ -> 566㎡) - 현장여건에 따른 난간 물량 증(150경간 -> 168경간) ▶ 팔각광장 보행 데크 진·출입로 구간 물량 변경 - 원활한 보행을 위해 진출입 구간에 데크계단 설치(1개소) - 데크계단 설치에 따른 플랜트박스 설치(1개소) - 현장여건에 따른 난간 물량 증(64경간 -> 65경간) - 관급자재(레미콘) 수급 불가에 따른 사급 변경	증감사항 반영
사회보험료 등 정산	▶ 사회보험료 등 정산 - 건강보험료(1,435,522원) -> 0원 - 연금보험료(2,102,618원) -> 0원 - 노인장기요양보험료(105,941원) -> 0원 - 건설기계대여금지급보증서발급(129,015원) -> 0원 - 환경보전비(297,728원) -> 160,000원	보험료 등 미사용분 정산

변경금액 (증19,796,080원)

(단위:원)

구 분		도 급 비 (원)			비 고
		당 초	변 경	증 감
도급비	공 급 가 액	145,566,455	138,800,000	감6,766,455
	부가가치세	14,556,645	13,880,000	감676,645
	소 계	160,123,100	152,680,000	감7,443,100
관급비		103,917,660	131,156,840	증27,239,180
총공사비		264,040,760	283,836,840	증19,796,080

예산과목 : 남산의입체적개발을통한서울의대표공원화, 남산및산하공원보수정비사업, 남산및산하공원시설물보수정비, 시설비

검토의견

공사현장 여건에 맞게 물량 변경사항을 반영하고자 하는 것으로 본 공사의 집행잔액 및 낙찰차액을 활용하여 설계변경하여 공사추진에 만전을 다하고자 함.

붙임  1. 변경내역서 1부.

2. 현장 사진 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.