문서번호	도시관리과-7772
결재일자	2018.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	도시경관팀장	도시관리과장		도시계획국장
박흥기	한영환	임창수		07/25 권기욱
협 조	주무관		심상훈
	전문관		서신석

「소외·낙후지역 경관 개선사업」

2019 대상지 확정 및 추진계획

2018. 7.

도시계획국

(도시관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	전문가 심사
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	시, 자치구 매칭(5:5)
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

「소외·낙후지역 경관 개선사업」

2019 대상지 확정 및 추진계획

2019 소외·낙후지역 경관 개선사업 추진 대상지를 확정하고 다음과 같이 세부추진 계획을 보고 드림

Ⅰ		관련근거 및 추진경과

□ 관련근거

❍ ’19~’20 소외·낙후지역 경관 개선사업 대상지 선정 2차(최종) 심사 결과(2018.6.25. 도시관리과-6643)

□ 추진경과

❍ ’18.3.16. 자치구 관계자(팀장/담당자) 교육 및 회의

- 종로구 등 14개 자치구 팀장(8명) 및 담당자(19명)

❍ ’18.3.20. ’19 경관사업 신규 대상지 선정 추진계획 수립

❍ ’18.4.23.~4.27. 사업취지 등 설명(시 도시계획관리위원회 의원)

❍ ’18.5.10. 대상지 수요조사(종로구 등 4개 자치구 7개소 응모)

❍ ’18.5.24.~5.31. 응모 대상지 예비조사(도시경관팀장외 2명)

❍ ’18.6.11. 1차 심사(4개 자치구 6개소 선정)

- 심사자 : 도시관리과장, 도시관리정책팀장, 도시경관팀장

❍ ’18.6.19.~6.20. 2차 심사(6개소 사업 우선순위 결정)

- 심사자 : 경관사업 자문위원 4명, 도시관리과장, 도시경관팀장

❍ ’18.6.26. ‘19 경관개선사업 대상지 선정결과 해당 자치구 통지

- 사업추진계획서(최종 사업예산 확보 방안 포함) 제출 요청

❍ ~’18.7.19. 종로구 등 4개 자치구, 경관사업 추진계획서 제출

Ⅱ		사업추진계획

□ 사업 개요

❍ 사업기간 : ’19.1.~’20.12.

❍ 추진방법 : 시, 구 5:5 매칭사업

- 자치구비 50% 확보 조건, 시비 50% 지원

- 용역 및 공사 자치구 시행(시 : 행정 지원 및 사업평가 등)

- 시 ‘경관사업 자문단’을 통한 기본설계시 사업계획 및 방향 자문

❍ 총사업비 : 최대 1,000백만원 내외(대상지 개소 당)

❍ 대 상 지 : 6개소

연번	자치구	경관사업 명
1	종로구	세검정로6나길 일대(신영동) 경관 개선사업
2	관악구	남현3길 경관 개선사업
3	종로구	창경궁로21길 일대(원남동) 경관 개선사업
4	금천구	안양천(금천구 구간) 경관 개선사업
5	종로구	종로2가(피맛길) 경관 개선사업
6	도봉구	노해로 주변 경관 개선사업

❍ 사업예산 편성계획(2019~2020년)

(단위 : 백만원)

대상지	계			설계용역비 (2019)			공 사 비 (2020)
	계	시비	구비	소계	시비	구비	소계	시비	구비
6 개소	3,530	1,765	1,765	350	175	175	3,180	1,590	1,590
종로구 신영동	500	250	250	50	25	25	450	225	225
관악구 남현동	150	75	75	20	10	10	130	65	65
종로구 원남동	450	225	225	50	25	25	400	200	200
금천구 안양천	1,100	550	550	100	50	50	1,000	500	500
종로구 종로2가 (피맛길)	230	115	115	30	15	15	200	100	100
도봉구 노해로	1,100	550	550	100	50	50	1,000	500	500

□ 대상지별 세부 추진계획

세검정로 6나길 일대(신영동) 경관 개선사업

❍ 사업위치 : 종로구 세검정로 6나길16~42

❍ 사업규모 : 면적 500㎡ (L= 160m,  W= 2~5m)

❍ 사업기간 : 2019.2.~2020.11.(2019 설계, 2020 공사)

❍ 사업예산 : 금500백만원(시비 250, 구비 250)

- 2019년 : 설계용역비 50백만원(시비 25, 구비 25)

- 2020년 : 공사비 450백만원(시비 225, 구비 225)

❍ 사업내용

- 노후 도로포장, 계단정비, 안전난간 설치

- 화단 및 텃밭 조성, 도색, 커뮤니티 공간 조성 등

남현3길 경관 개선사업

❍ 사업위치 : 관악구 남현3길(서울 남현동 요지 주변 길)

❍ 사업규모 : 면적 360㎡ (L= 120m,  W= 3m)

❍ 사업기간 : 2019.2.~2020.10.(2019 설계, 2020 공사)

❍ 사업예산 : 금150백만원(시비 75, 구비 75)

- 2019년 : 설계용역비 20백만원(시비 10, 구비 10)

- 2020년 : 공사비 130백만원 편성(시비 65, 구비 65)

❍ 사업내용

- 서울 남현동 요지 주변길 및 벽면 정비, 도로포장면 개선

- 야간 경관조명 설치 등

창경궁로 21길 일대(원남동) 경관 개선사업

❍ 사업위치 : 종로구 창경궁로 21길 7~7-18, 141~동순라길106-2

❍ 사업규모 : 면적 1,000㎡ (L= 340m,  W= 1.5~5m)

❍ 사업기간 : 2019.2.~2020.11.(2019 설계, 2020 공사)

❍ 사업예산 : 금450백만원(시비 225, 구비 225)

- 2019년 : 설계용역비 50백만원(시비 25, 구비 25)

- 2020년 : 공사비 400백만원 편성(시비 200, 구비 200)

❍ 사업내용

- 노후 도로 및 계단 정비, 시설물 정비

- 상가 입면정비, 조경 및 식재, 공공디자인 시설물 설치 등

안양천(금천구 구간) 경관 개선사업

❍ 사업위치 : 안양천(금천구 구간)

❍ 사업규모 : L= 6.03㎞

❍ 사업기간 : 2019.1.~2020.12.(2019 설계, 2020 공사)

❍ 사업예산 : 금1,100백만원(시비 550, 구비 550)

- 2019년 : 설계용역비 100백만원(시비 50, 구비 50)

- 2020년 : 공사비 1,000백만원(시비 500, 구비 500)

❍ 사업내용

- 특색 있는 보행환경 및 경관조성을 통한 환경개선

- 하천 접근성 향상 및 야간경관 개선, 안전시스템 CPTED 적용

종로2가(피맛길) 경관 개선사업

❍ 사업위치 : 종로구 종로11길6~삼일대로 403(종로2가, 인사동)

❍ 사업규모 : 면적 400㎡ (L= 160m,  W= 2~3m)

❍ 사업기간 : 2019.2.~2020.11.(2019 설계, 2020 공사)

❍ 사업예산 : 금230백만원(시비 115, 구비 115)

- 2019년 : 설계용역비 30백만원(시비 15, 구비 15)

- 2020년 : 공사비 200백만원 편성(시비 100, 구비 100)

❍ 사업내용

- 공중선· 건물 후면 실외기· 조명전기선 정비, 불법 시설물 철거

- 건물 후면 외장재, 도색, 피맛길 적용 디자인 시설물 개선 등

노해로 주변 경관 개선사업

❍ 사업위치 : 도봉구 노해로(도봉경찰서 ~ 한국마사회) 구간

❍ 사업규모 : 총 연장 800m (보도 폭 3~6m)

❍ 사업기간 : 2019.1.~2020.12.(2019 설계, 2020 공사)

❍ 사업예산 : 금1,100백만원(시비 550, 구비 550)

- 2019년 : 설계용역비 100백만원(시비 50, 구비 50)

- 2020년 : 공사비 1,000백만원(시비 500, 구비 500)

❍ 사업내용

- 보행자 중심의 자연친화적인 가로경관 조성

- 유휴공간 활용을 통한 주민휴식 공간 조성 등

Ⅲ		행정사항

❍ 6개 대상지 사업비(시비) 175백만원, 2019 세출예산 편성(예정)

※ 2019년 사업예산 편성요구 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	계	자 치 구
설계용역비	175	종로구(3) 65, 관악구 10, 금천구 50, 도봉구 50

끝.