문서번호	주거정비과-9347
결재일자	2018.7.25.
공개여부	비공개(5)
방침번호

주무관		주거환경개선팀장		주거정비과장		도시관리국장
정재훈		김국환		나재진		07/25 문인식
협조

★ ◉

- 옥수극동아파트 리모델링관련 -

정밀안전진단 용역 계약기한 연장 검토보고

성   동   구

- 옥수극동아파트 리모델링관련 -

정밀안전진단 용역 계약기한 연장 검토보고

Ⅰ		사업개요

용 역 명 : 옥수극동아파트 리모델링 정밀안전진단 용역

위    치 : 독서당로 191(옥수동, 옥수극동아파트)

규    모 : 지상15층, 아파트 8개동, 900세대(1986.12. 준공)

용역기간 : 2018.02.22. ~ 7.27.(150일)

용 역 비 : 407.7백만원(조합부담)

용역기관 : 사단법인 대한산업안전협회

Ⅱ		추진경위

2017.03.31. : 옥수극동아파트 리모델링주택조합 인가

2017.09.26. : 정밀안전진단 요청(조합장 유재범)

2017.10.25. : 정밀안전진단 시행계획 수립

2017.12.11. : 용역비 예치(조합장 유재범)

2017.12.13. ~ 2018.02.22 : 업체선정 및 계약

2018.02.28. : 정밀안전진단 용역착수

2018.04.19. : 용역변경 계약(누락된 지반조사 반영)

2018.07.20. : 계약기한 연장요청 접수

Ⅲ		용역기한 변경검토

용역기한 변경신청 내용

변 경 전	변 경 후	비 고
2018.02.28. ~ 07.27. (150일)	2018.02.28. ~ 9.21. (206일)	증) 56일

○ 사  유: 조합의 요청으로 지반상태에 대한 추가 조사를 실시하여 그 결과를 정밀안전진단 용역에 반영하고자 함

※ 계약금액 변경없음

검토의견

- 옥수극동리모델링 조합에서 요청한 사항으로 정확한 정밀안전진단용역을 위하여 계약기한 연장 처리코자 함

Ⅳ		향후계획

재무과에 계약기한 연장처리 요청

붙임  1. 계약기한 연장요청 문서 1부.

2. 리모델링조합 검토의견서 1부.  끝.