문서번호	도로포장연구센터-955
결재일자	2018.7.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로포장연구센터장	품질시험소장
이창민		백종은	07/26 한민희
협 조
	주무관			윤진성

2019년 도로공동 확인조사 용역 관련

산출내역서 및 과업내용서 변경 보고

2018. 7.

서울특별시품질시험소

(도로포장연구센터)

2019년 도로공동 확인조사 용역 관련

산출내역서 및 과업내용서 변경 보고

서울시 도로에서 공동에 의한 사고예방을 위해 진행중인 도로공동 확인조사 용역의 산출내역 및 과업내용을 변경하고자 함

Ⅰ		변경근거 및 사유

□ 변경근거

○ 2019년도 도로공동 확인조사(핸드형GPR, 도로천공, 영상촬영) 용역 추진계획

【도로포장연구센터-1800, 2018. 7. 16.】

○ 기술용역 타당성 심사 요청【도로포장연구센터-929, 2018. 7. 16.】

○ 2017 지반조사 표준품셈【2017. 9. 18.】

□ 변경사유

○ 2017년 지반조사 표준품셈 개정 시 공동탐사 2차조사(핸드형GPR, 도로천공, 영상촬영)와 관련하여 품셈이 신설됨

○ 변경 전 용역의 산출내역은 기존 용역만을 근거로 하였으나, 신설된 지반조사 표준품셈이 있으므로 기존 용역의 산출내역과 변경된 품셈을 근거로 산출내역을 변경하고자 함

○ 지반조사 표준품셈의 참여인원 및 장비손료, 재료비를 고려하여 산출내역을 변경하고자 하며, 산출내역서 변경에 따라 과업내용서의 일부 수정이 필요함

Ⅱ		용 역 개 요

□ 과업명 : 2019년도 도로공동 확인조사(핸드형GPR, 도로천공, 영상촬영)

□ 과업목적

○ 서울시에서 지정하는 분석공동 위치에 대하여 천공 및 영상촬영 등을 실시하여 공동의 존재유무 및 규모를 정확하게 파악하는 것을 목적으로 함

□ 계획수량 : 핸드형GPR(150개소), 천공 및 영상촬영(100개소)

□ 과업기간 : 계약일로부터 2019년 11월 30일까지

□ 소요예산 : ****************

Ⅲ		산출내역서 변경사항

□ 지반조사 표준품셈(2017년)

○ 핸드형GPR

가) 핸디 GPR 탐사 공동조사 계획 준비, 답사, 해석 및 보고서 작성

종별	세 목	단위	계획‧준비	현지답사‧자료검토	데이터처리‧해석	보고서 작성 (건당)
			(건당)	(1km)	(1km)
인건비	기 술 사	인	1.0			1.0
	특급기술자	인	1.0	1.0	2.5	1.0
	고급기술자	인	1.0	1.0	2.5	2.0
	중급기술자	인		1.0	5.0	2.0

나) 핸디 GPR 탐사 공동조사 측정	km당

종별	세 목	규 격	단위	측선설정	측정
인건비	고급기술자		인	1.0	2.0
	중급기술자		인		2.0
	초급기술자		인	1.0	2.0
손료	지표레이더		hr		16.0
	GPS측량기		hr		16.0

○ 천공 및 영상촬영(간이시추 및 내시경촬영)

다) 핸디 GPR 탐사 공동확인 (간이시추 및 내시경촬영)                     개소당

종별	세 목	규 격	단위	간이시추 조사	내시경 조사
인건비	고급기술자	총괄,조사	인	0.3	0.2
	중급기술자	조사	인	0.3	0.2
노무비	보 링 공	시추	인	0.3	0.2
재료비	비트	2inch 이상	개	0.1
	휘발유		ℓ	0.6	0.6
	잡재료	휘발유의	%	38.0	38.0
손료	간이시추기	Φ50 이상	hr	0.2
	발전기	5kW	hr	0.2	0.2
	내시경촬영장비		hr		0.2

□ 지반조사 표준품셈 적용사항

○ 핸드형GPR: 표준품셈의 핸디GPR 데이터 처리 및 해석, 측정 적용

- 인건비는 표준품셈의 1/100, 장비운용시간은 표준품셈 적용

	적용근거
∙ 개소당 핸드형GPR 측정거리가 10m 이하 → 품셈 기준의 1/100 ∙ 발주처가 지정한 장소에서 조사하는 핸드형GPR은 품셈의 공동탐사용 핸디GPR에 비해 단순 작업임

○ 천공 및 영상촬영: 표준품셈의 간이시추 및 내시경촬영 적용

- 개소당 인건비는 표준품셈의 50%, 장비운용시간은 표준품셈 적용

	적용근거
∙ 지반조사 표준품셈의 천공깊이 기준은 2m 이내이지만, 2019년 수행할 천공 및 영상촬영은 1m 이내이므로 인건비를 표준품셈의 50% 적용 ※ 2016~2018년 수행된 용역의 평균깊이는 천공 0.4m 이내, 영상촬영 0.6m 이내임

○ 현장답사 및 협의: 표준품셈의 현지답사와 자료검토 적용

- 1km 당 현지답사와 자료검토를 1건으로 환산 적용

	적용근거
∙ 2016, 2017년 용역수행과 지반조사 품셈의 인건비를 조합하여 적용 ∙ 발주처가 지정하는 위치에서 조사를 수행하는 것이므로 현장답사 및 협의가 간소화 됨

○ 보고서작성: 지반조사 표준품셈의 핸디GPR 보고서 작성 적용

○ 장비손료 및 재료비(직접경비): 지반조사 표준품셈 적용

□ 변경 산출내역

구분		당초산출내역 비용(원)	변경 요청 내역(원)	변경액(원)
총 계		80,000,000	80,000,000	변경 없음
직접 인건비	핸드형 GPR	8,762,700	5,105,700	감 3,657,000
	천공 및 영상촬영	8,520,700	14,133,000	증 5,612,300
	현장답사 및 협의	4,362,000	3,497,970	감 864,030
	보고서작성	1,651,949	1,485,757	감 166,193
제경비		25,627,083	26,644,669	증 1,017,586
기술료		9,784,886	10,173,419	증 388,533
직접경비		13,695,736	11,307,036	감 2,388,700
순해배상공제료		478,288	478,288	변경 없음
공급가액		72,727,273	72,727,273	변경 없음
단위조정		-156,069	-98,566	감 57503
부가가치세		7,272,727	7,272,727	변경 없음

Ⅳ		과업내용서 변경사항

□ 변경 내역

당초 내용	변경 내용
10. 과업내용 변경 및 계약금액 조정 가~다(생략) 라(일부생략) - 단, 핸드형GPR과 천공의 수량은 핸드형GPR(현장답사 및 유관기관 협의 포함) 후 천공이 제척된 2개소를 천공 및 영상촬영까지 완료된 1개소로 갈음할 수 있다.	10. 과업내용 변경 및 계약금액 조정 가~다(생략) 라(일부생략) - 단, 핸드형GPR과 천공의 수량은 핸드형GPR(현장답사 및 유관기관 협의 포함) 후 천공이 제척된 3개소를 천공 및 영상촬영까지 완료된 1개소로 갈음할 수 있다.

○ 변경사유: 개소당 핸드형GPR 금액은 감소하고, 천공 및 영상촬영의 금액는 증가하여 갈음할 수 있는 개소수를 변경함

Ⅴ		과업 추진계획

□ 용역발주: ‘19. 2월

□ 용역계약: ‘19. 2월

□ 용역수행: ‘19. 2~11월

붙임  1. 과업내용서(수정본) 1부.

2. 산출내역서(수정본) 1부.