투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(중랑캠핑숲 물놀이장 조성 및 정비공사 건설폐기물 처리용역)

1. 시설과-3186(2018.7.13.)호와 관련입니다.

2.  『중랑캠핑숲 물놀이장 조성 및 정비공사 건설폐기물 처리용역』에 대하여 아래와

같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 중랑캠핑숲 물놀이장 조성 및 정비공사 건설폐기물 처리용역

나. 공사기간 : 2017. 12. 13. ~ 2018. 7. 30.

다. 도 급 비 : 금9,830,000원(금구백팔십삼만원)

라. 도 급 자 : ***************************************

마. 변경금액 (증1,700,000원)

구 분		도 급 비 (원)			비 고
		당 초	변 경	증 감
도급비	공 급 가 액	8,936,364	10,481,818	1,545,454
	부가가치세	893,636	1,048,182	154,546
	합 계	9,830,000	11,530,000	1,700,000

바. 예산과목 : 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원

보수정비사업, 남산 및 산하공원 시설물 보수정비, 시설비(이월예산)

붙 임    1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 각1부.  끝.

조경팀장	이무림		시설과장	07/26 김재균
협조자	재무팀장	김기중
시행	시설과-3365	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231 4층(예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5966	/전송	02-3783-5969	/		/	부분공개(7)