투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	서울공예박물관 조성공사 정보관 강당 철거 취소 지시

1. 『서울공예박물관 조성공사』와 관련입니다.

2. 위 공사와 관련 당초 철거로 되어 있는 정보관 1층 강당에 대하여 의뢰부서(박물관과)에서 정보관 면적이 부족하여 멀티비디어실 추가반영 설계변경 계획이 있어 철거공사 취소 요청되었음을 알려드리니 철거공사에서 제외하여 주시기 바라며 추후 공사비에 대하여는 정산하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 정보관 설계변경 요청 내용 1부.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	1.서울공예박물관 조성공사 건설사업관리단,2 서울공예박물관 조성공사 현장대리인
주무관	이영주		문화시설과장	윤용훈		건축부장	07/27 임인구
협조자
시행	건축부-10566	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 13층 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2628	/전송	02-3708-2659	/	wn1004@seoul.go.kr	/	대시민공개