문서번호	치수과-11403
결재일자	2018.7.27.
공개여부	대시민공개

주무관	하수담당	치수과장		안전건설교통국장
이동구	김익기	代장관규		전결 07/27 하순호
협 조
					기획예산과장		한재헌
					예산담당		代박용순

- 하월곡동 76-7 ~ 76-8 구간 사각형거 보수보강공사 -

공사현황 실정보고

안전건설교통국

(치  수  과)

- 하월곡동 76-7 ~ 76-8 구간 사각형거 보수보강공사 -

공사현황 실정보고

Ⅰ		관 련 근 거

□ 실정보고 사유서 제출의 건 : 대한주택 18-07-03호(2018.07.24.)

Ⅱ		사 업 개 요

□ 공 사 명 : 하월곡동 76-7 ~ 76-8 구간 사각형거 보수보강공사

□ 공사기간 : 2018.04.20. ~ 2018.08.20.

□ 도 급 액 : 280,307,400원

□ 도 급 자 : ㈜대한주택안전관리 대표 송 선종

□ 사업개요

❍ 사각형거 보수보강 ▢2.0m×2.05m, L=245m

- 단면보수(T=30~50mm) : 487.59㎡

- 철근노출단면보수(T=30mm) : 392.90㎡

Ⅲ		실정보고내용

□ 상기 공사 시행중 설계도면과 현장조사 결과 손상물량이 상이하여 증가된 물량을 실정보고를 통해 추가 반영코자 함

❍ 추가 정비물량

주 요 공 종	당 초	변 경	증 감	비 고
단 면 보 수	487.59 ㎡	648.81 ㎡	(증) 161.22 ㎡
철근노출 단면보수	392.90 ㎡	392.90 ㎡	-
소 계	880.49 ㎡	1,041.71 ㎡	(증) 161.22 ㎡

❍ 추가 소요예산(부가세 미포함)

주 요 공 종	당 초	변 경	증 감	비 고
단 면 보 수	83,567,463	111,012,362	(증) 27,444,899
철근노출 단면보수	88,533,181	88,533,181	-
열화단면제거	16,083,868	19,025,891	(증) 2,942,023
부 대 공	8,913,165	9,124,761	(증) 211,596
제 잡 비	57,727,233	61,773,805	(증) 4,046,572
소 계	254,824,910	289,470,000	(증) 34,645,090

Ⅳ		검 토 의 견

□ 현장조사 결과 하수사각형거내 좌·우측 벽체가 전체적으로 노후화가 심하게 진행된 상태로 재료분리 등 현재 손상정도를 감안할 때 장기적 내구성 확보를 위하여 추가 시공이 필요한 실정임

Ⅴ		조 치 계 획

□ 추가 시공이 필요한 구간에 대하여는 도급업체에 작업지시하여 선 시공후 물량증가에 따른 소요공사비는 낙찰차액중 일부를 사용하여 추후 설계변경 정산처리 하고자 함

❍ 사업예산 활용계획                                   (단위:천원)

구 분	예 산 액	도 급 비	가 용 금 액
			계	이 전 비	낙찰차액
당 초	320,000	280,308	39,692	1,000	38,692
변 경		318,417	1,583	1,583	-

붙   임 : 1) 공사 위치도 1부.

2) 도급업체 실정보고서 1부.

2) 설계도서 각 1부.  끝.