위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	조달물품(교량점검통로) 변경계약 요청

우리과에서 시행중인 「잠실대교외 5개소 교량점검통로 조달구매」건에 대하여 아래와 같이  변경계약 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 교량점검통로 수량 변경 요청 내역

건명	계약 번호	규 격	단위	수량			수량 변경 사유	비고
				당초	변경	증감
잠실대교 외 5개소 교량점검통로	00175088601 (㈜현대기업)	알루미늄제교량난간, HD-3127,W1500×H1270mm	m	489.4	477.46	(감) 11.94	- 현장 실측에 따른 설치수량 정산	계약금액 당초:155,482,380원 변경:151,689,042원 감) 3,793,338원

나. 예산과목

- 교량안전과, 교량관리, 한강교량관리, 교량점검시설정비공사,시설비 및부대비, 시설비

붙임 1. 합의각서 1부.

2. 잠실대교 외 5개소 교량점검통로 설치 수량변경(정산) 보고서 1부. 끝.

	교량안전과장
주무관	백운경		교량관리팀장	유제천		교량안전과장	07/27 김종호
협조자
시행	교량안전과-13335	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	300-8452	/전송	300-8459	/		/	대시민공개