위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 의뢰(전통사찰 홍보 안내판 제작 설치)

1. 문화정책과-8923(2018.07.26.)호와 관련입니다.

2. 전통사찰 홍보 안내판 제작 설치 공사와 관련하여 계약변경 사유가 발생, 다음과 같이 변경계약을 체결하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 전통사찰 홍보 안내판 제작 설치

나. 계약업체 : 주식회사 아트매니아플러스(대표 : 황석상)

다. 계약금액 : 금21,700,000원(금이천일백칠십만원)

라. 계약기간 : 2018.4.27 ~ 7.31

마. 변경내용 : 계약기간 변경

당 초	변 경
2018-04-27 ~ 2018-07-31	2018-04-27 ~ 2018-08-31

바. 변경사유 : 안내판 홍보문구 확정 지연에 따른 준공기한 연장

붙임 : 1. 변경계획 방침 1부

2. 합의각서 1부.  끝.

	문화정책과장
주무관	이승헌		종무팀장	김남수		문화정책과장	07/27 서영관
협조자
시행	문화정책과-8992	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-2522	/전송	02-2133-1059	/	silki1231@seoul.go.kr	/	부분공개(6)