위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 준공기한 연기 의뢰

1. 물순환정책과-13314(2018.7.25.)호와 관련입니다.

2. 우리과에서 시행 중인「2018년 빗물마을 조성사업 기본 및 실시설계 용역」에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2018년 빗물마을 조성사업 기본 및 실시설계 용역

나. 계 약 자 : ㈜서우티이씨

다. 준공기한 연기 : (당초) 2018. 8. 4. ⇒ (변경) 2018. 8. 22.

라. 귀책사유 : 서울특별시

마. 연기사유 : 제7회 전국동시지방선거와 관련 선거일전 60일부터 선거일까지(4.14~6.13) 공청회, 위크숍 등 제한행위로 주민 위크숍이 연장되어 절대공기가 부족하여 준공기한을 연기하고자 함.

붙 임 : 1. 준공기한 연기 방침 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 변경계약합의서 1부.  끝.

	물순환정책과장
주무관	정재훈		물재이용관리팀장	강철규		물순환정책과장	07/27 한유석
협조자
시행	물순환정책과-13458	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	2133-3853	/전송	2133-1041	/	1007jjh@seoul.go.kr	/	부분공개(6)