＂깨끗한 당신이 청렴 성북을 만듭니다＂
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	2018년 구 소규모 편익시설(도로) 설치공사(연간단가) 설계변경 (제1회) 시행

우리구에서 시행중에 있는『2018년 구 소규모 편익시설(도로) 설치공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 제1회 설계변경을 시행하고자 합니다.

1. 공  사  명 : 2018년 구 소규모 편익시설(도로) 설치공사(연간단가)

2. 계약상대자 : 명운산업(주)  대표 김경희

3. 공 사 기 간 : 2018. 3. 29. ~ 12. 31.

4. 설계변경내역

[단위 : 원]

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
총공사비	815,384,000	1,112,697,000	증) 297,313,000
도 급 비	345,384,000	642,697,000	증) 297,313,000
관 급 비	282,016,690	282,016,690
이 전 비	187,983,310	187,983,310

5. 설계변경사유

- 공사 시공 물량 증·감 및 신규 공정 발생

6. 예산과목

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는 도로관리,

구 소규모 편익시설(도로) 설치공사, 시설비및부대비, 시설비

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 안전하고 쾌적한 지역도로망 확충,

석관동 334-23 도로개설, 시설비(구비-59,000천원)

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 안전하고 쾌적한 지역도로망 확충,

동소문동 7가 5~7-1간 도로개설, 시설비(구비-150,000천원)

- 도로건설, 간설도로망 확충(도시개발특별), 성북동길 확장, 시설비(시비-15,000천원)

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 안전하고 쾌적한 지역도로망 확충,

보국문로 도로 환경개선, 시설비(구비-55,313천원)

붙  임 : 1) 설계변경 사유서 1부.

2) 설계변경내역서 1부.

3) 재비율 검증 확인서 1부.

4) 방침서 각 1부. 끝.

주무관	김용필		도로계획담당	이상문		도로과장	최광천		안전건설교통국장	07/30 하순호
협조자	계약담당	이계웅		재무과장	代정수영
시행	도로과-13115	(		)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168 성북구청 도로과	/
전화	02-2241-3542	/전송	02-920-2946	/	kypill00@sb.go.kr	/	대시민공개