문서번호	기전설비과-4709
결재일자	2018.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
이상록	조성태	유성종		06/15 구아미
협 조
	기획예산과장		김형규
	재무회계과장		박병식
	시설과장		송병욱

우면산가압장 급수체계 개선 공사

기계분야 관급자재(밸브) 추가 구매 계획

(우면산가압장) 관급자재 추가구매 계획

2018. 6.

상수도사업본부

【 생산부】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

우면산가압장 급수체계 개선 공사

기계분야 관급자재(밸브) 추가 구매 계획

우리 본부에서 시행중인「우면산 가압장 급수체계 개선 공사」에 소요되는 관급자재(밸브)의 추가 구매 계획을 보고 드림.

Ⅰ		기계분야 사업 개요

◯ 사 업 명 : 우면산가압장 급수체계 개선공사(기계분야)

◯ 사업기간 : 2017.12.13. ~ 2020.05.30.

◯ 주요내용 : 우면산가압장 가압펌프 및 암사 저양정계통 송수펌프 교체

◯ 기계분야 공사비 : 3,858백만원 (총 공사비 : 12,351백만원)

∙ 기계분야 배관공사 :   813백만원(계약완료)

∙ 기계분야 관급자재 : 3,045백만원

◯ 추가구매 대상(기계분야 관급자재)

구매년도		품 명	대수	금액 (백만원)	비고
2018	당초	크레인	1	45	구조물 건축 일정에 따라 시행
		밸브류	2	85	양재배수지 유출밸브(계약완료)
	추가	밸브류	2	53	양재배수지 유입밸브(추가구매)

◯ 추가구매 사유

∙ 당초 배수지 유출밸브(2대)는 2018년, 유입밸브(2대)는 2019년에 시공       계획하였으나, 유출입 밸브실 개량(토목분야)의 통합 수행을 위하여 유입,       유출밸브를 동시에 교체하도록 계획을 수정함.

※ 관련근거 : 우면산가압장 급수체계 개선사업 책임건설사업관리기술자 보고자료

「변경예정공정표 보고」(우면감 제2018-178호, 2018.6.14)

Ⅱ		2018년 추진계획

□ 관급자재별 계획

월별 공종별	6	7	8	9	10	11	비고
유출밸브(1500A) 구매·설치							계약완료 (2018.3.2.)
	제 작			설치
유입밸브(1200A)구매·설치							금회 추가
	계약	제 작		설치
천장크레인 구매·설치							계약의뢰완료 (2018.6.12.)
	계약	제 작			현장 설치

※ 유·출입 밸브실 일괄개량을 위하여 당초 2019년 설치 예정된 유입밸브(1200A) 설치를 금회 시행토록 계획을 변경함.

□ 관급자재 설치도

< 우면산가압장 흡수정 평면도 >

Ⅲ		세부추진계획

□ 양재가압장 흡수정 유입밸브 구매

◯ 구매대상 : 전동식 버터플라이밸브 1,200A × 2대

◯ 소요예산 : 약53백만원

◯ 예산과목 : 자본적지출, 비가동설비자산취득, 우면산가압장급수체계개선

시설비 및 부대비, 시설비

◯ 구매방법 : 조달구매(3자단가)

붙임 : 책임건설사업관리기술자 (변경)예정공정표  1부. 끝.