투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2018년 제6차 설계변경 자문회의(소위원회) 개최

1. 2018년 제6차 설계변경자문회의(소위원회) 개최와 관련입니다.

2. 설계변경 자문회의를 아래와 같이 위원을 선정하여 개최하오니 발주부서 담당자는 자문자료에 단가결정, 설계자 검토의견, 실정보고서, 발주처의 방침서 등 근거자료를 포함한 자문자료를 작성(쪽번호 명시)하여 자문위원에게 사전 배포하여 주시기 바라며,

3. 자문위원께서는 협의단가 적용의 타당성, 공법변경의 적정성, 설계변경절차 이행의 타당성을 면밀히 사전검토하여 내실있는 자문이 이루어 질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 설계변경 자문회의 개최 계획

제 목	제6차 설계변경자문회의(소위원회)
일 시	2018. 7. 19.(목) 14:00~
장 소	도시기반시설본부 14층(방재시설부) 회의실
자문위원	위원장 : 토목부 명 경 출 간 사 : 토목부 남 덕 희 위 원 : 토목부 박 웅 교, 김 구 감리단장 ************************************ 감리단장 ************************************ 감리단장 *******************************
자문안건 (17건)	1. 종로 중앙버스전용차로 설치공사 ------------------------------ 토 목 부 ○ 교통소통대책 용역비 ⇒ 증 219,450 천원 ○ 충격방지흡수시설 설치 ⇒ 증 221,110 천원 ○ 신설횡단보도 주변 화강판석 임시포장(1차 돌관공사) ⇒ 증 368,236 천원 ○ 동절기 콘크리트 타설시 보온양생 ⇒ 증 130,800 천원 ○ 이동식 정류장 구조물 터파기 투입장비 및 인원 변경 ⇒ 증 75,394 천원 ○ 교통안전시설물 추가 설치 ⇒ 증 176,235 천원 ○ 교차로 아스콘 표층포장 ⇒ 증 191,300 천원 ○ 버스도착 안내 단말기(BIT)설치 ⇒ 증 224,752 천원 ○ 중앙차로 무단횡단금지 휀스 이동형 설치 ⇒ 증 243,991 천원 ○ 교통안전시설(속도제한 하향표지판) 설치 ⇒ 증 115,170 천원 2. 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 ------------------ 토 목 부 ○ 계측비 반영 ⇒ 증 145,576 천원 ○ 가설휀스 변경 ⇒ 증 53,563 천원 ○ 1처리장 반송수관로 가시설 공법 변경 ⇒ 증 196,500 천원 3. 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사 --------------------- 토 목 부 ○ 노들길 옹벽구간 흙막이가시설 존치기간 변경 ⇒ 증 165,500 천원 ○ 지반조사 결과에 따른 콘크리트말뚝 길이변경 ⇒ 증 78,200 천원 4. 강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사 ------------------------ 토 목 부 ○ Sheet Pile 천공공법 변경 ⇒ 증 311,100 천원 ○ 금하지하차도 토공상차비 반영 ⇒ 증 982,200 천원

붙임 : 자문요청서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	방재시설부장,동부간선도로확장공사(3공구) 책임건설사업관리기술자,천호대로(광나루역) 확장공사 책임건설사업관리기술자,성산대교 성능개선공사 책임건설사업관리기술자
주무관	임준우		도시고속도로과장	명경출		토목부장	전결 07/11 김영수
협조자	주무관	남덕희
시행	토목부-12195	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 빌딩 12층 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8667	/전송	02-3708-2599	/	junu0301@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)