문서번호	방재시설부-9540
결재일자	2018.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		환경시설과장	방재시설부장
조양호		장수철	07/23 이임섭
협 조

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 감독 권한대행 등 건설사업관리용역

물가변동에 의한 계약금액 조정 검토 보고

2018.07.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 감독 권한대행 등 건설사업관리용역

물가변동에 의한 계약금액 조정 검토 보고

『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 감독 권한대행 등 건설사업관리용역』관련 물가변동(제1회)으로 인한 계약금액 조정 요청 건에 대한 검토 보고임. ※ 근거 : 중랑 감 18-163호(2018.7.16.)

Ⅰ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 감독 권한대행 등 건설사업관리용역

○ 용역규모 : 총인처리시설 450,000㎥/일

○ 용역기간 : 총괄 2017.06.19. ~ 2019.10.06.

1차  2017.06.19. ~ 2018.07.31.

○ 용역금액 : 총괄 2,134백만원, 1차 600백만원

○ 용역업체 : ㈜천일 대표이사 김창욱 외 3

Ⅱ		검 토 내 용

○ 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 물가변동(제1회) 반영

- 계약 체결 후 계약금액을 구성하는 각종 품목 또는 비목의 가격이 상승

또는 하락된 경우 그에 따라 계약금액 조정

○ 관련규정

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조

- 같은 법 시행령 제73조 및 같은 법 시행규칙 제72조

- 기술용역계약 일반조건 15조

○ 계약금액 조정대상 여부

- 계약금액 조정요건 : 아래 2가지 조건 동시 충족

· 기간조건 : 계약체결일 이후 90일 이상 경과 - 충족(202일)

· 변동조건 : 품목조정률 3% 이상 – 충족(3.89%)

○ 물가변동에 의한 계약금액 조정(제1회)

(단위 : 원)

구 분	검토내용		비 고
	총괄	1차
1. 기준시점 (직전 조정기준일)	2017.06.12	2017.06.12	직전 조정기준일 (계약체결일 )
2. 비교시점 (조정기준일)	2018.01.01	2018.01.01	계약 체결 후 90일 이상 경과
3. 계약금액	2,134,104,000	600,000,000
4. 물가변동 적용제외 금액	374,934,000	358,434,000	조정기준일 이전분
5. 물가변동 적용대가 금액	1,759,170,000	241,566,000
6. 등락폭	68,430,000	9,390,000	5 × 물가변동율
7. 물가변동율(K)	3.89%	3.89%	조정율 3% 이상 충족
8. 선금급 공제금액	-	-
9. 물가변동 반영금액	68,430,000	9,390,000

○ 계약금액 변경

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경			증 (감)	비 고
		조정율 (K)	물가변동 반영금액	변경금액
총 괄	2,134,104	3.89%	68,430	2,202,534	증 68,430
1 차	600,000	3.89%	9,390	609,390	증 9,390

Ⅲ		조 치 의 견

○ 위 보고내용과 같이 관련 규정에 따른 조정요건이 충족되어 물가변동에 의한 계약금액 조정이 적정한 바, 추후 설계변경(총괄 및 1차분) 시 반영코자 함.

붙임 : 관련 공문 1부.   끝.