문서번호	한양도성도감-7089
결재일자	2018.7.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
구선이		代박근우	07/31 진용득
협조

한양도성(혜화동 전시안내센터 주변) 성벽 임시구조 보강

공사 설계변경(정산) 검토보고

2018. 7.

공사 설계변경(정산) 검토 보고

한양도성 (혜화동 전시안내센터 주변)성벽 임시 구조보강 공사에 다음과 같이 변경사항이 있어 계약금액을 조정 하고자 함

사업개요

○ 공 사 명 : 한양도성 (혜화동 전시안내센터 주변)성벽 임시 구조보강 공사

○ 사업기간 : `18. 07. 09. ~ `18. 08. 07.

○ 계약금액 : 금49,891,500원

○ 계 약 자 : ㈜재우씨엔씨********

변경사항

○ 계약금액 변경 : 금49,891,500원→금48,149,000원(1,742,500원 감액)

○ 변경사유 : 국민 건강 보험료, 국민 연금 보험료, 노인 장기요양 보험료 정산으로 계약금액 변경(감액).

○ 변경 내역

구분		당초	변경	증감	비고
순공사원가	재료비	3,080,455	-	-
	노무비	30,896,158	-	-
	경비	6,154,544	4,771,148	△1,383,396	국민건강, 국민연금, 노인장기 요양 보험료 정산
순공사비 계		40,131,157	38,747,761	△1,383,396
일반관리비		2,407,869	2,324,865	△83,004
이윤		2,816,883	2,699,192	△117,691
부가가치세		4,535,591	4,535,591	△158,409
도급액		49,891,000	48,149,000	△1,742,500	천단위절삭
총공사비		49,891,000	48,149,000	△1,742,500

향후 계획

○ 상기의 변경 금액으로 계약 변경(정산) 후 준공 처리

붙임 : 설계 변경(정산) 내역서 1부.  끝.