위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	1종교량 보수보강공사 건설사업관리단 책임기술자
(경유)
제목	작업기간 연기요청에 대한 승인 통보(5차 작업요청)

1. 1종교량 제18-213호(2018.7.26.)와 관련입니다.

2. 위 호로 작업요청(5차)에 대한 작업기간 연기요청 검토보고에 대하여 아래와 같이  승인하오니 공사 연기로 인하여 시민 불편이 발생하지 않도록 관리에 만전을 기하여  주시기 바랍니다.

가. 승인내용

1) 작업기간 : 당 초  2018. 4.24. ~  7.31.

변 경  2018. 4.24. ~  9.15.

2) 작업내용 : 교면포장 등 5건

3) 변경사유 : 폐아스콘 반출 불가 및 개질아스콘 반입 지연으로 인한 작업지연. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	송시영		강남일반교량팀장	이홍재		교량안전과장	전결 07/31 김종호
협조자
시행	교량안전과-13529	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-1974	/전송	02-2133-1429	/	ssyw@seoul.go.kr	/	대시민공개