투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	「교통안전시설 원인자부담공사(신한방 지식산업센터)」감리사 실정보고에 대한 승인 통보

1. 귀 청(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 교통관리과-13206(2018.05.31) 및 협우지여 제18-434(2018.07.31)호와 관련입니다.

3. 위 호의 관련된 감리사 실정보고(설계변경)에 대하여 승인함을 통보합니다.

4. 공사개요 및 주요 변경내용

가. 공 사 명 : 구로구 구로동 신한방 지식산업센터 교통안전시설물 설치 공사

나. 공사장소 : 서울시 구로구 디지털로 243

다. 공사내용 : 교통신호기(차/보) 신설 및 이설

라. 공사관련 업체(기관)

- 원인자 : *****

- 감리사 : **********

- 시공사 : *****

마. 변경내용 : 현장여건 및 승인 조건 반영으로 인한 물량 변동(상세내용: 붙임참조)

바. 변경사유

- 횡단보도 위치가 규제도면의 위치와 상이함에 따른 횡단보도 위치 조정

- 지중 지장물(지하슬러브, 오수관로 등)로 인한 굴착방향 변경

- 전원인입점 변경(실시설계 상의 전원인입점에 저압반 없음)

- 도로사업소 조건부 승인사항 반영

5. 행정사항

가. 원인자께서는 교통신호기 공사와 관련된 주요사항 발생 시 승인부서와 사전 협의하여         주시기 바랍니다.

나. 감리사께서는 변경된 물량의 기자재 검수 시 시험성적서와 반입자재규격 일치 여부를        반드시 확인 후 검수 및 시공하여 주시고 공사 기간 연장, 조건부 승인사항 관련 등의         중요사항 발생 즉시 사실 관계를 포함하여 실정보고하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 실정보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계도면(변경전후) 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서울특별시지방경찰청장(교통관리과장),서울구로경찰서장(교통과장),서울특별시장(교통운영과장),(주)비와이씨,(주)협우지여엔지니어링
주무관	이성도		기전과장	전결 07/31 송장현
협조자	주무관	정경성
시행	기전과-6557	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/
전화	02-2657-7963	/전송	02-2657-7939	/	lsd2000@seoul.go.kr	/	부분공개(7)