문서번호	급수운영과-13897
결재일자	2018.7.31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관		급수운영과장		북부수도사업소장
최용진		장종욱		07/31 심말숙
협 조
	시설관리과장				변재홍
	기전팀장				박성철
	주무관				윤승구

2019년 공릉배수지 외 12개소

정밀안전진단 용역 추진 계획

2018. 7.

북부수도사업소

급수운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2019년 공릉배수지 외 12개소

정밀안전진단 용역 추진 계획

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제12조(정밀안전진단의 실시)에 따라 공릉배수지 외 12개소 상수도시설물에 대한 정밀안전진단을 실시하여 시설물의 안전성 확보 및 유지관리에 철저를 기하고자 함

Ⅰ				관 련 근 거
		c

□ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제12조(정밀안전진단의 실시)

○ 2019년  안전진단 및 점검대상 통보 : 본부 시설관리과 –6249(2018. 7. 25.)

○ 시설물 안전점검 실시 주기

안전등급	정 밀 점 검		정밀안전진단	비 고
	건 축 물	상수도(그 외 시설물)
A등급	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상
B․C등급	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상
D․E등급	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상

Ⅱ				그간 추진내용
		c

□ 안전진단 관리대상

구 분	계(개소)		배수지(개소)	아리수올림터(개소)	비 고
1종시설물	계	16	8	8
	급수운영과	7	3(공릉, 월계, 상계)	4(상계,중계,쌍문1,쌍문2)
	시설관리과	9	5(4.19, 번동소, 우이, 수유5, 수유6)	4(미아, 수유, 우이, 번동)

□ 최근4년간 안전점검 현황

연도	계	정밀안전진단	정밀점검	비 고
2015년	16개소	공릉배수지외 15개소 (5개소 A등급)(10개소 B등급)	-	A.B등급 (2014 계약체결, 2015년 준공)
2016년	11개소	-	공릉배수지외 10개소	B등급
2017년	5개소		쌍문1 아리수올림터외 4개소	A등급
2018년	11개소		공릉배수지외 10개소	B등급

Ⅲ				추 진 계 획
		c

□ 2019년도 정밀안전점검 대상

○ ’19년도 대상 선정 : 2014년 정밀안전진단 시 A.B등급 시설물

○ 배수지 6개소 281,600㎥/일, 아리수올림터 7개소 55,861㎥/일

구 분		대상 시설물	위 치	용 량	준공연도	비 고
정밀안전진단	배수지	공릉배수지	공릉동 141-4	170,000㎥	1998년	6개소
		월계배수지	월계동 63-4	100,000㎥	1988년
		상계배수지	상계동 산161-2	1,400㎥	1988년
		번동소배수지	번동 148-8	2,000㎥	1988년
		우이배수지	우이동 73-146	2,000㎥	1986년
		수유6배수지	수유동 산84-5	3,000㎥	1992년
	아리수 올림터	미아 아리수올림터	미아동 691-2	16,600㎥	1980년	7개소
		상계 아리수올림터	상계동 117-5	5,500㎥	1983년
		우이 아리수올림터	우이동 73-146	8,500㎥	1983년
		쌍문2 아리수올림터	쌍문2동 137-59	1,200㎥	1981년
		수유 아리수올림터	수유동 605-288	16,317㎥	1989년
		번동 아리수올림터	번2동 148-18	7,052㎥	1988년
		중계 아리수올림터	중계동 27-25	692㎥	1986년

□ 추진기간 : 2019. 4. ~ 2019. 9.(착공일로부터 180일간)

□ 추진일정

○ 2018. 8.     : 자료조사 및 설계서 작성, 기술용역타당성 심사요청

○ 2019. 3.     : 용역발주

○ 2019. 4.~ 9. : 사업추진

※ 2019년도 상반기 배수지 청소일정과 병행 시행

○ 2019. 9.     : 용역 준공 및 결과 보고

○ 2019. 10.    : FMS 실적 입력

□ 사업비

○ 소요예산  : 402,000천원

○ 예산과목 (가압장․배수지 등 시설물유지관리 - 상수도시설물안전진단)

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

□ 용역 방법

○ 수리시설분야 또는 종합분야의 정밀점검 전문용역 업체 계약 시행

○ 일반공개경쟁 또는 수의계약 입찰

□ 정밀점검 과업내용

○ 시설물 관련도서 검토 및 계획수립

○ 기 실시한 진단결과 주요사항에 대한 보수 이력을 확인

○ 현장조사

○ 제반관련 시험실시 – 비파괴 현장 시험등

○ 시설물별 조사결과 분석

○ 종합적인 상태평가 : 구조적 상태평가, 기능적 상태평가

- 시설물 기초와 주위 지반으로 구조에 미치는 영향분석

- 구조물 외관조사 및 비파괴 현장시험, 초음파 측정, 재료시험 결과분석

- 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 등급에 대한 소견

○ 보수·보강 공법 및 개략 공사비 제시

○ 보고서 작성 및 기타(유지관리 방안 제시)

□ 선택과업(내진성능평가) 추가 시행

○ 내진설계 대상시설물 중 내진성능평가 미시행 시설물은 정밀안전            진단시 내진성능평가 포함 시행

‣관련법령:시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』제12조(정밀안전진단의 실시)

③ 관리주체는 「지진·화산재해대책법」 제14조제1항에 따른 내진설계 대상 시설물 중 내진성능평가를 받지 않은 시설물에 대하여 정밀안전진단을 실시하는 경우에는 해당 시설물에 대한 내진성능평가를 포함하여 실시하여야 한다.

‣ 금회 대상 : 배수지 1개소, 아리수올림터 7개소

․ 배수지 : 상계

․ 아리수올림터 : 미아, 상계, 우이, 쌍문2, 수유, 번동, 중계

Ⅳ				행 정 사 항
		c

○ 기술용역(정밀점검) 타당성 심사 요청 : 본청 기술심사담당관

○ 타당성 심사결과 보고 : 본부 시설관리과

○ 정밀점검 용역 최종 결과보고 : 본부 시설관리과

붙임   1. 관련법규, 정밀점검 및 정밀안전진단 지침 각 1부.

2. 용역설명서 및 과업내용서 각 1부.

3. 용역설계내역서 1부.  끝