문서번호	산지방재과-7441
결재일자	2018.7.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		사면총괄팀장	산지방재과장
조양연		이정환	07/31 김영삼
협조

사방시설 완료지역(2013년 준공) 사방시설 점검용역 설계변경 요청에 따른 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 7. 31.

서울특별시 푸른도시국

(산지방재과)

사방시설 완료지역(2013년 준공) 사방시설 점검용역

설계변경 요청에 따른 검토보고

사방시설 완료지역(2013년 준공) 사방시설 점검용역 수행중 실정보고 되어 승인된 사항에 대한 설계변경 요청이 있어 검토 보고 드림.

※ 관련근거 : 경기-43(2018.7.26.) 설계변경계약요청

사업개요

❍ 사 업 명 : 사방시설 완료지역(2013년 준공) 사방시설 점검용역

❍ 규     모 : 사방댐 점검(37개소), 산지사방점검(88개소, 26ha)

❍ 사업기간 : 2018. 5. 28. ~ 2018. 8. 5.

❍ 용 역 사 : 사방협회 경기지부(회장 김남균)

❍ 용 역 비 : 19,411천원(예산액 21,810천원)

보고 내용

❍ 관련근거

- 추가과업에 대한 검토보고 승인(산지방재과-6970호,2018.7.18.)

⇒ 성과품 제출 부수를 당초 5부를 30부로 제작 승인(증2,399천원)

- 계약변경 요청에 대한 승인(산지방재과-6276호,2018.6.28.)

⇒ 점검 개소수 당초 156개소(26ha)를 88개소(26ha)로 내역변경 승인

❍ 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 · 감
용역금액	19,411천원	21,810천원	증2,399천원
용역기간	‘18.5.28.~ ’18.8.5.	없음.	-

조치의견

❍ 기 승인된 사항에 대한 설계변경 요청사항으로 증2,399천원은 낙찰차액을 사용 설계변경 시행하여 용역 준공에 만전을 기하고자 함.

붙임 1) 용역사 변경 요청 공문 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.  끝.