투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	중랑물재생센터 슬러지건조시설 설치공사 건설사업관리단 책임건설사업관리기술자 서윤석
(경유)
제 목	폭염에 따른 공사 일시정지 요청에 대한 승인 통보

1. 시설보수과-4056(2018. 7. 31.)호 및 중랑슬관2018-301(`18. 7. 31)호와 관련입니다.

2. 상기 호와 관련 귀단에서 제출한 “폭염에 따른 공사일시 중지 요청”건에 대하여 승인 통보하니

가. 일시 중지 전에 공사현장 정리를 완료하고 최고온도가 39도가 예상되는 `18. 8. 2일부터 공사장 일시중지를 하여 최고온도가 33℃ 이하가 예보되는날 공사가 재개될 수 있도록 하고

나. 신속한 공사 재개와 중지기간 중 비상상황에 대비하여 비상연락체계를 상시유지하도록 하며

다. 현장관리를 위해 현장소장 및 관리인원은 정상근무할 수 있도록 하여 현장관리에 만전을 기하고

라. 건설사업관리단은 일시중지기간 중 기술검토 및 사후조치 등 사업관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 폭염에 따른 공사일시중지요청 검토보고서 1부,  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	안봉용		시설보수과장	08/01 윤승범
협조자
시행	시설보수과-4059	(		)	접수		(		)
우	04809	서울시 성동구 자동차시장3길 64(송정동 73) 중랑물재생센터 본관 3층 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	2211-2560	/전송	2211-2579	/	abbby@seoul.go.kr	/	대시민공개