문서번호	주거환경개선과-8104
결재일자	2018.8.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주거환경정책팀장	주거환경개선과장
권경희		노경래	08/02 남정현
협조

******************

기본 및 실시설계 시행계획 변경

2018. 8.

도시재생본부

(주거환경개선과)

******************

기본 및 실시설계 시행계획 변경

*********** 조성 기본 및 실시설계’와 관련하여 심사위원회
의견 등을 고려하여 과업내역 및 기간을 변경하여 시행하고자 함.

Ⅰ		추진 경위

❍ 한양도성 순성길 주변 정비사업 실행계획 (본부장방침, ‘17.12.11)

❍ 지명초청공모 시행계획 및 용역 공고(‘18.5.28)

❍ 심사 및 당선작 선정 (주거환경개선과-7842, ‘18.7.30)

구 분	낙산공원 정상	하늘정원
업체명 (대표자)	에스큐빅 디자인 랩******** ㈜생각나무파트너스건축사사무소****** ※ 주계약자는 국내건축사에 한함	㈜코어건축사사무소*****

Ⅱ		변경 내용

※ ‘18.7.25 심사위원회 의견 반영

구 분		당 초	변 경	비 고
용 역 비	****	26,518천원	33,718천원	직접경비 증액 · 자문비 220만원 · 조감도 500만원
	****	26,860천원	34,060천원
과업기간	****	50일	90일	낙산성곽길구간(‘18.7~11)과 협력 추진 필요
	****	50일	90일

※ 제783차 기술용역타당성심사 의견 : 추가 경비는 자체 검토 반영

Ⅲ		향후 일정

○ ‘18.8. 3     계약 의뢰

○ ‘18.8~11   기본 및 실시설계 추진

붙임 : 내역서(안) 각 1부.   끝.