문서번호	시설보수과-6172
결재일자	2018.8.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
최지락		신동헌	08/02 이학구
협조	주무관		권순회
	주무관		이동섭

2018년 도로시설물 보수공사 폐기물처리용역(연간단가)

설계변경(1회) 검토 보고

2018. 8

서부도로사업소

(시설보수과)

2018년 도로시설물 보수공사 폐기물처리용역(연간단가)

설계변경(1회) 검토 보고

우리 사업소에서 시행하고 있는 ‘2018년 도로시설물 보수공사 폐기물처리용역’에 대한 설계변경(1회) 검토 보고임.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2018년 도로시설물 보수공사 폐기물처리용역(연간단가)

○ 용역기간 : 2018. 5. 25 ~ 2018. 12. 31

○ 용역규모 : 폐기물 운반 1,112㎥, 폐기물 처리 2,575톤

○ 계 약 자 : ㈜태현 대표 신상칠 / (유)도성개발 대표 윤칠중

○ 계약금액 : 59,000천원

□ 주요 추진경위

○ 2018. 05. 24  : 용역 계약 및 착수

○ 2018. 05. 29  : 건설폐기물 처리계획 신고(마포구)

○ 2018. 06.~    : 건설폐기물 운반 및 처리

□ 설계변경 검토

○ 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	비 고
총용역비		**********	**********	*************
도급비	공급가액	**********	**********	*************
	부 가 세	*********	*********	**************
	계	**********	**********	*************

- 예산과목

① 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 교량시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비(***********)

② 도로시설과, 도로시설관리, 터널시설관리, 도로시설물(터널,복개,지하차도,세척) 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비(************)

③ 도로시설과, 도로시설관리, 하천복개구조물관리, 녹번천복개보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비(***********)

④ 도로시설과, 도로시설관리, 하천복개구조물관리, 욱천복개2구간 보수, 시설비 및 부대비, 시설비(*********)

⑤ 도로시설과, 도로시설관리, 지하차도시설관리, 성산지하차도 보수, 시설비 및 부대비, 시설비(************)

⑥ 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 사천교 성능개선, 시설비 및 부대비, 시설비(사고이월)(***********)

○ 예산현황 검토

****************************************

*********************************************************************

***************************************

***********************************************

○ 설계변경 사유 : 세부 물량 증·감 내역 별도 산출내역 참조

- 사천교 확장 및 성능개선공사 폐기물 처리물량 반영(시설보수과-3376호,‘18.4.26.)

‣ 아스콘포장 평삭재 미처리 물량과 신축이음장치 및 교통신호기 이설로 발생된 물량을 포함하여 폐아스콘 61톤, 폐콘크리트 115톤, 아스콘평삭재 43톤 반영

- 성산지하차도 보수공사 시행에 따른 폐기물 설계수량 추가 반영

‣ 폐아스콘 21.1톤, 폐콘크리트 37톤, 아스콘평삭재 428톤

- 도로시설물(터널,복개,지하차도) 일상유지보수공사 계약 초과 물량 및 용역 계약전 다년간 직영반 작업 등으로 발생한 폐기물 처리물량 반영

‣ 배수로 준설 토사(혼합폐기물) 발생량 및 포장방수층 처리로 인한 혼합폐기물 계약 초과물량 반영

‣ 사업소내 적치 폐콘크리트 80톤, 혼합폐기물 24톤 등

※ 사업소내 폐기물 처리 예산은 일상유지보수공사(터널,복개,지하차도) 낙찰차액 활용

□ 조치의견

○ 사천교 확장 및 성능개선공사로 발생된 폐기물 처리량을 정산하고,  사업소내 폐기물 처리 및 공사 시행으로 발생된 초과 처리물량에 대하여 반영하고자 하며,

○ 시행예정인 성산지하차도 보수공사 폐기물 수량을 반영하여 설계변경코자 함.

붙임 : 폐기물처리용역 설계변경(정산) 내역서 1부.