문서번호	도로보수과-7101
결재일자	2018.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
박성근		유태용	08/03 김용제
협조

2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 제4차 작업지시 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 8

강서도로사업소

(도로보수과)

2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

제4차 작업지시 완료 보고

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 사업기간 : 2018. 3. 8. ~ 2018. 12. 31.

○ 시공업체 : (주)세흥실업  대표 김덕자

○ 도 급 비 : 656,370,000원

□ 작업완료 보고

○ 건    명 : 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제4차)

○ 작업위치 : 구로구 경인로(오류IC~오류삼거리)외 16개소

○ 작업기간 : 2018. 06. 21. ~ 2018. 07. 31.

○ 공사금액

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	120,784천원	117,236천원	감) 3,548천원
관 급 비	46,022천원	44,647천원	감) 1,375천원
총 공사비	166,806천원	161,883천원	감) 4,923천원

○ 작업내역

연번	장 소	당 초(m)	변 경(m)	증·감(m)	증·감 사유
1	신정교	1,000	93	감) 907	보고내용 참조
2	경인로 (오류IC~오류삼거리앞)	7,189	7,538	증) 349	퇴색된 보도간 횡단보도 추가 시행

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
3	양천구 남부순환로 425 (남부순환로방향곰달래입구)	6,422	6,496	증) 74	퇴색된 보도간 횡단보도 추가 시행
4	강서구 가양동 1456-7 부근 (궁산공원둘레길입구)	114	343	증) 229	퇴색된 보도간 횡단보도 추가 시행
5	국회대로 (목동교~여의도구간)	26,453	29,523	증) 3,070	보고내용 참조
6	영등포구국회어린이집 (국회식물원~국회제2어린이집)	24	24	-	-
7	강서구화곡동426-4 (형제카센터인근)	239	179	감) 60	현장실측 물량차이
8	강서구화곡동860-15 (곰달래마트인근)	48	48	-
9	강서구화곡동110-70 (화곡본동시장인근)	48	48	-
10	강서구마곡동222-30 (서남물재생센터인근)	85	75	감) 10	현장실측 물량차이
11	양천구남부지방법원앞 (신월로386앞)	24	24	-
12	강서구 화곡로 일대	5,753	3,000	감) 2,753	보고내용 참조
13	영등포구여의도동4, 여의도선착장 교차로	149	-	감) 149	보고내용 참조
14	영등포구여의서로국회3문앞 (여의하류IC→여의2교북단)	455	-	감) 455
15	영등포구국회대로584, 타이어뱅크앞	242	158	감) 84	현장실측 물량차이
16	CM충무병원, 영등포구문래로191	21	-	감) 21	기 작업완료 (버스 정차노면)
17	양천구목동동로235 목운초등학교앞삼거리	9,180	5,885	감) 3,295	보고내용 참조
18	강서구 공항대로417~441	2,286	2,286	-	16년 규제사항 (차로재구획)
합계		59,732	55,720	감) 4,012

○ 보고내용

- 제2차 작업지시(추가 1개소 포함) 18개소 중 15개소 작업완료

- 연번 1 신정교 주변 재도색 민원사항은 양호한 구간이 많아 횡단보도 재도색만 시행

- 연번 5 국회대로(목동교~여의도 구간) 구간 중 퇴색된 보도간 횡단보도(30개소)를 포함하여 추가 작업시행

- 연번 12 화곡로 일대 차로재구획 중 KB국민은행(강서지점)~홈플러스(강서점) 구간은 강서구청 물관리과 하수박스 신설공사 구간내에 있어 공사일정 협의에 따라 추후 작업시행

- 연번 13,14 구청 토목공사(보도턱 낮춤) 지연으로 작업 미시행(구청 공사 후 별도 작업시행)

- 연번 17 양천구 목동동로(양천경찰서 요청)구간 일부가 18년 하반기 노후포장도로 정비공사에 포함되어 있어 작업제외

□ 검토결과 및 조치계획

○ 위 보고내용 중 일부 물량 변경이 불가피하여 현장여건에 적합하게 완료하였으며, 작업완료량에 대해서는 추후 정산처리 하고자 함.

붙 임  1. 제4차 작업완료 내역서 1부.

2. 제4차 작업완료 사진대지 1부(별도첨부).

3. 제4차 작업완료 도면 1부(별도첨부).