＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	중부수도사업소
수신	서울교통공사사장
(경유)
제목	철도보호지구내 시공계획 변경에 따른 협의(경복궁역주변,동십자각사거리주변)

1. 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀 공사에 감사드립니다.

2. 서울교통공사 토목처-2529(2018.03.14.)호와 관련 우리사업소에서 시행중인「종로구 내자동 142 ~ 중학동 14번지 간 송배수관 정비공사」중 현장의 지하 시설물로 인해 아래와 같이 시공 계획을 변경하여 시행코자 하오니 협의하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

- 공 사 명 : 종로구 내자동 142 ~ 중학동 14번지 간 송배수관정비공사

- 공사개요 : 구경 200~400mm, 연장 900m(변경없음)

- 공사기간 : 2018. 4. 30. ~ 2018. 10. 26.(변경없음)

나. 시공계획 변경내용

- 당초 : 경복궁역사거리 및 동십자각사거리 지하시설물 하월시공을 위한

작업구(3 × 4) 5개소 설치

- 변경 : 해당구간 지하시설물 상월시공(작업구 5개소 취소)

붙임 : 계획도면 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이보민		시설관리팀장	김상웅		시설관리과장	08/03 허준행
협조자
시행	시설관리과-22281	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가) 중부수도사업소	/
전화	02-3146-2198	/전송	02-3146-2239	/	lbm74@seoul.go.kr	/	부분공개(5)