투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	‘서울바이오허브 조성 지열시스템 구매설치’(총차,1차) 설계변경(정산) 의뢰

우리 본부에서 시행 중인‘서울바이오허브 조성(2단계) 지열시스템 구매설치’와 관련, 설계

변경 (정산)사항이 발생하여 아래와 같이 계약 변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공   사   명: 서울바이오허브 조성(2단계) 지열시스템 구매설치(총차 및 1차)

2. 계   약   자: ㈜제이앤지

3. 계약 변경 내용

가. 계약 변경금액

구 분	계약금액(원)			비 고
	당 초	변 경	증․감
총 차	402,500,000	407,850,000	증 5,350,000
1 차	200,000,000	199,090,000	감 910,000

나.  납품기간: 변경없음 ▹총차:2017.12.08.~2019.2.28. ▹1차:2017.12.08.~2018.8.14.

다. 설계(정산)변경 사유     ▹총차: 원활한 공정 및 현장여건 반영

▹1 차: 현장여건 및 준공 관련 보험료 등 정산

4. 예산과목 : 신성장산업과, 신성장산업 육성지원, 산업클러스터 조성 및 활성화, 홍릉바이오                 허브앵커 조성 및 운영, 시설비 및 시설부대비, 시설비

따로 붙임 1. 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 건설사업관리기술자 설계변경 검토 보고서 1부.

3. 설계변경 내역서 등(총차, 1차, 합의각서 포함) 각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	박경철		시책사업과장	임병국		설비부장	08/03 권오식
협조자
시행	설비부-10884	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8647	/전송	3708-8659	/	pkc6896@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)