문서번호	기반시설과-2237
결재일자	2018.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
김일문		代정상범	08/03 전영주
협 조

계측기기 변경 실정보고에 대한 검토보고(제내지)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 8

한강사업본부 시설부

- 풍납토성·나루터길나들목개선공사-

계측기기 변경 실정보고에 대한 검토보고

『풍납토성·나루터길나들목 개선공사 계측관리용역』중 제내지측 계측기기 변경에 대한 보고임.

⇒ 신마포감2018-253(2018.8.3)

Ⅰ		용역개요

❍ 용 역 명 : 풍납토성·나루터길나들목 개선공사 계측관리용역

❍ 공사개요

· 도 급 비 : 79,530천원

· 공사기간 : 2017.12.11.~ 2018.12.31

· 용 역 사 : 에이스톤엔지니어링(주) 대표 이영순

· 건설관리용역:(주)삼안외2개사 책임기술자 김원두

Ⅱ		보고내용

❍ 현    황 : 당초 제내지측 지중경사계 및 건물경사계 각 3개소씩 6개소 설치하는 것으로 설계 반영됨,

현장 인근 강변그대가 아파트가 2017년 강동구청 하수도 공사중 20여세대의 화장실 균열발생 등의 피해 사례가 있어 2017년 12월 주민설명회시 조사를 해달라는 주민요청이 있었음.

❍ 문 제 점

· 지중경사계 : 제내지측 옹벽상단에 설치하여야 하나 옹벽상부장소가 협소하여 설치장비 진입이 불가

· 건물경사계 : 설치여건은 상기와 같고 또한 설치를 하여도 옹벽이 높아 설치후 측정하는데 어려움이 많음.

· 사전현황조사 : 하수도공사시 균열 등의 문제가 발생하여 집단민원이 발생한 지역으로 사전에 향후 민원발생 상존.

❍ 조치방법 : 상기와 같은 조건으로 제내지측 지중경사계와 건물경사를 제외하고 정밀도가 높은 구조물경사계(센서식)를 현장별 3개씩 6개소를 설치하여 구조물 안전을 도모코자 하며,

강변그대가 아파트 또한 사전현황 조사를 실시하여 향후 발생 할수 있는 민원에 대비함이 타당할 것으로 사료됨.

구 분	당 초	변 경	비 고
공 종	건물경사계 + 지중경사계	구조물경사계(센서식)
개 념 도	건물경사계 지중경사계
문제점 (현장설치)	- 지장물이 존재하여 설치불가 (지중경사계) 구조물철거후 옹벽이 높아 계측에 어려움이 있음	고가의 장비
장 점	정밀도 양호 설치심도별로 변위 확인	정밀도가 건물경사계보다 양호하여 현장여건에 적합
단 점	현장여건상(지장물존재) 설치불가

Ⅲ		비용검토

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
계	25,289,000	19,767,000	감5,522,000
계측기 변경	25,289,000	14,806,000	감10,483,000
사전현황조사	0	4,961,000	증4,961,000

Ⅳ		조치계획

❍ 현장여건 등을 검토한 바, 당초 설계된 지중경사계와 건물경사계를

구조물경사계로 변경하여 계측 등 시행

❍ 현장인근 아파트에 대하여는 사전현장조사를 실시하여 향후 발생할 수 있는 민원에 대비하고자 함.

❍ 실정보고대로 승인 및 시행하고 추후 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 실정보고 1부. 끝.