문서번호	토목부-13684
결재일자	2018.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목부장
박태혁		08/03 代이동훈
협조	주무관		오열상
	주무관		안상혁

교통안전시설물 설치 검토보고(남단IC Ramp-A )

(월드컵대교 건설공사)

2018. 8.

도시기반시설본부

(토목부)

교통안전시설물 설치 검토보고(남단IC Ramp-A)

(월드컵대교 건설공사)

남단IC Ramp-A에 대한 교통규제심의 결과를 반영한 교통 안전시설물 설치 및 차선 변경 등에 대해 검토 보고 드림.

□ 관련근거

○ 「도로교통법」 시행규칙(안전표지의 설치 기준)

○ 교통노면표시 설치 및 관리매뉴얼(경찰청)

□ 추진경위

○ ‘10.11.9. : 교통안전시설 개선·설치 변경 통보(서울지방경찰청 → 도기본)

- 기    간 : ‘14.9.5.~‘14.11.30.(67일)

- 위    치 : 올림픽대로(성산대교 → 공항방향, 200m)

- 요청사항 : 교통안전시설물 설치

○ ‘18.5.9.  : 교통처리 규제 (재)심의 요청(도기본 → 서울지방경찰청)

○ ‘18.5.25. : 교통안전시설 개선·설치 변경 통보(서울지방경찰청 → 도기본)

- 기    간 : ‘18.9.1.~‘20.6.30.(22개월)

- 위    치 : 올림픽대로(성산대교 → 공항방향, 291m)

- 요청사항 : 차로 폭 조정(3.6m → 3.25m), 교통안전시설물 설치

□ 건설사업관리단 보고내용

○ 교통안전시설물 설치 현황도

당 초	교통안내표지판(5개) PE 방호벽, 윙카(290m) L = 200m RAMP-A
변 경	PC 방호벽, 윙카(290m) 데리네이터(58개) 차량유도 화살판(12개) 로봇신호수(1개) 가림막휀스(290m) L = 291m RAMP-A 교통안내표지판(9개)

○ 교통 규제 재심의에 따른 변경 현황

- 교통 규제 심의 결과 반영

· 교통안전시설물 추가 설치 요청 : PC 방호벽 외 8건

· 차로폭 축소 요청 : 당초 3.5m → 변경 3.25m

- 차로 점용 구간 증가에 따른 추가 설치 : 당초 200m → 변경 291m

○ 공사비 검토

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
교통안전시설물 설치	63,500	85,800	증 22,300

※ 단가적용 : 기존비목 → 기 계약단가 적용,

신규비목(안내표지판, 로봇신호수, 차량유도판) → 협의율 적용(82.004%)

(공사계약 일반조건 제 19조 2,3으로 계약상대자의 책임 없는 사유로 판단)

□ 조치계획

○ 상기 실정보고 건에 대한 건설사업관리단의 의견 검토 결과 건설사업관리단      의견이 타당하다고 판단되어 승인하고

○ 추후 본부내 설계변경자문회의 결과를 반영하여 정산조치코자 함.

붙임  건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.