문서번호	도시철도토목부-9498
결재일자	2018.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
엄상민		代김용선	08/03 정대현
협 조
	주무관			김용선
	주무관			노권호

『지하철9호선 3단계 920공구 건설공사』

계약금액 조정 검토 보고(총괄9회, 10차1회)

2018. 8

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『지하철9호선 3단계 920공구 건설공사』

계약금액 조정 검토 보고(총괄9회, 10차1회)

『지하철9호선 3단계 920공구 건설공사』와 관련 책임감리원으로부터 총괄9회, 10차1회에 대한 계약금액 조정 요청이 있어 이에 대한 검토 보고임. ※ 벽산엔지니어링㈜ 벽산(E)189FGC24-00026호(‘18. 7. 20)

1		사업 개요

○ 공 사 명 : 지하철9호선 3단계 920공구 건설공사

○ 공사개요 : 연장1,390.5m

(터널934.5m, 정거장1개소, 본선환기구4개소)

○ 공 사 비 : 159,474백만원(10차 : 13,637백만원)

○ 공사기간 : ‘09.12.31 ~ ‘18.12.31

(10차 : ‘18. 2. 10 ~ ‘18. 12. 31)

○ 시공회사 : 롯데건설(주)외 1개사

○ 감 리 사 : 벽산엔지니어링㈜

○ 차수공사 준공 및 발주현황

(단위 : 백만원)

구 분	총 괄	준공(1~9차)	10차	장래	비 고
공사기간	‘09.12.31 ~‘18.12.31	‘09.12.31 ~‘17.12.31	‘18. 2. 9 ~‘18.12.31	-
공사비	157,562 (1,371)	145,837 (649)	13,637 (723)	-

※ ( )괄호는 세입세출외 현금(광역상수도 이설공사 : 한국수자원 수탁공사분)

2		추진 경위

○ ‘14. 3. 3 : 보행환경개선 시장지시(보도에 환기구 설치하는 사례가 없도록 하기 바람)

○ ‘14. 4. 4 : 인도 10계명 추진계획(시장방침 제125호)

○ ‘15. 2.17 : ‘걷기 편한 행복한 거리만들기’ 지하철 환기구 개선계획

(본부장방침 - 도시철도계획부)

○ 16. 1.15 : 지하철 환기구 개선계획 실정보고 승인(본부 → 감리단)

※ 환기구 개선에 따른 교통영향분석 개선대책 용역 시행 승인

○ ‘16. 4.12 : 지하철 환기구 개선계획 환기구 등 설치계획 변경 및 실시설계용역 시행 승인(본부 → 감리단)

○ ‘16. 7.13 : 교통영향평가(변경) 심의 결과 통보(국토교통부 → 본부)

○ ‘17.12.26 : 환기덕트 위치 이전 관련 설계변경자문 소위원회 개최

○ ‘18. 3. 7 : 환기덕트 위치 이전 관련 설계변경자문 본부위원회 개최

○ ‘18. 4.13 : 광역상수도 이설공사 설계변경 보완사항 회신

(수자원공사 → 본부)

○ ‘18. 4.19 : 광역상수도 이설공사 설계변경 협의 결과 통보(본부 → 감리단)

○ ‘18. 7.20 : 총괄9회 및 10차1회 계약금액 조정 요청(감리단 → 본부)

3		보고 내용

□ 총괄9회 변경 현황

○ 계약금액 조정내역 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감
공사기간	‘09.12.31～‘18.12.31	‘09.12.31～‘18.12.31	변경없음
공사비	159,474,424	161,247,861	증)1,773,437

○ 변경 사유

- 광역상수관 이설공사 변경 금액 반영(금664백만원)

․광역상수관 이설공사 중 저촉되는 시상수관(D700, D500) 이설공사비

- 환기덕트 돌출부 중앙분리대 위치 이전 관련 설계 반영(금1,109백만원)

․보행환경 개선대책 일환으로 지하철 환기구 개선 계획에 의거 환기덕트 돌출부 위치를 보도측에서 도로중앙부로 이전하여 시민들의 보행권 보장 및 도시미관 제고

○ 공사비 조정 현황

(단위 : 백만원)

구 분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증 감
토 목	본선개착	11,385	11,385
	본선터널	30,395	30,395
	934정거장	20,739	20,840	증)101
	본선환기구	16,252	16,674	증)422
	기 타	2,658	2,715	증)57
	소 계	81,429	82,009	증)580
건축		4,255	4,255
전기		3,804	3,804
기계설비		10,227	10,227
직접공사비계		99,715	100,295	증)580
제 경 비		29,058	29,206	증)148
설계비 외		10,415	10,764	증)349
물가변동(1∼4회)		14,648	14,680	증)32
광역상수도 이설		1,372	2,036	증)664
공사손해보험료		4,226	4,226
사후환경조사용역		35	35
강원지역 제설장비 지원		5	5
도급금액		159,474	161,247	증)1,773

□ 10차1회 변경 현황

○ 계약금액 조정내역 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감
공사비	13,637,224	15,410,661	증)1,773,437
공사기간	‘18. 2. 9～‘18.12.31	‘18. 2. 9～‘18.12.31	변경없음

○ 변경 사유

- 광역상수관 이설공사 변경 금액 및 환기덕트 돌출부 중앙분리대 위치 이전 관련 설계 반영

○ 설계 물량조정 현황(10차 공사)

구 분	구 간	공 종	단위	수 량			비 고
				당 초	변 경	증 감
9차	본선개착	되메우기	m3	15,252	15,252	-
		포 장 공	a	30	30	-
	934정거장	되메우기	m3	20,011	20,011	-
		구 조 물	m3	1,395	1,740	증)345
		포 장 공	a	65	65	-
	본선환기구	되메우기	m3	12,895	9,562	감)3,333
		구 조 물	m3	420	944	증)524
		포 장 공	a	49.16	67.48	증)18.32
	광역 상수관 이설	강관부설	m	98	98	-
		상수관 이설	m		97	증)97	D500, D700
	건축		식	1	1	-
	전기		식	1	1	-
	기계		식	1	1	-

○ 공사비 조정 현황

(단위 : 백만원)

구 분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증 감
토 목	본선개착	734	734
	934정거장	1,408	1,510	증)102
	본선환기구	824	1,245	증)421
	기 타	235	292	증)57
건 축		1,574	1,574
전 기		596	596
기계설비		2,692	2,692
직접공사비계		8,063	8,643	증)580
제 경 비		2,709	2,857	증)148
물가변동(1∼4회)		1,581	1,613	증)32
시설분담금 외		561	910	증)349
광역상수도 이설공사		723	1,387	증)664
도급금액		13,637	15,410	증)1,773

4		책임감리원 검토의견

○ 총괄9회 및 10차1회 설계변경에 대해 검토한 결과

- 환기덕트 구조물 이전 설치 및 중앙분리대 설치공사, 광역상수도 이설공사 중 저촉되는 시 상수관(D500, D700) 이설공사 변경 금액에 대해 적절히 반영한 것으로 판단됨.

5		조치 계획

○ 책임감리원 검토의견과 같이 총괄9회 및 10차공사 계약금액 변경에 대해 설계변경 처리코자 함.

- 계약금액 조정 내역(총괄9회 및 10차1회)

(단위 : 천원)

구 분	공사비			계약기간		비고
	당 초	변 경	증감	당 초	변 경
총괄 9회	159,474,424	161,247,861	증)1,773,437	‘09.12.31 ~‘18.12.31	변경없음
10차 1회	13,637,224	15,410,661	증)1,773,437	‘18. 2. 9 ~‘17.12.31	변경없음

※ 예산 구분 내역(총괄9회 및 10차1회)

(단위 : 천원)

구 분	공사비(당초)		공사비(변경)		비 고
총괄 9회	159,474,424		161,247,861		증)1,773,437
	158,102,828 (특별회계)	1,371,596 (세입세출)	159,212,168 (특별회계)	2,035,693 (세입세출)	1,109,340 (특별회계)	664,097 (세입세출)
10차 1회	13,637,224		15,410,661		증)1,773,437
	12,914,628 (특별회계)	722,596 (세입세출)	14,023,968 (특별회계)	1,386,693 (세입세출)	1,109,340 (특별회계)	664,097 (세입세출)

붙 임 : 감리검토 의견서 및 관련 자료 1부.  끝.